투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시인재개발원
수신자	내부결재
(경유)
제 목	다솜관 숙소 리모델링 전기공사 설계변경(정산) 시행

우리 원내 다솜관(생활관) 숙소에 대한 리모델링 전기공사를 설계 변경(정산)을 다음과 같이 시행하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 다솜관 숙소 리모델링 전기공사

나.  공사개요 : 욕실벽부등 설치 33개소, 방등 설치 33개소, 기타 1식

다. 공사금액 : 금59,627,170원(금오천구백육십이만칠천일백칠십원)

라. 공사기간 : 2016.04.01. ~ 05.20

마. 계약업체 : ㈜대조전설 대표 장철호

바. 변경사유 : 실제시공에 따른 물량변동

사. 변경내역

(단위 : 원)

구분	당초금액	변경금액	증/감
총공사비	59,627,170	65,975,550	(증) 6,348,380
도 급 비	47,164,170	63,800,000	(증) 16,635,830
관 급 비	12,463,000	2,175,550	(감) 10,287,450

아. 예산과목 : 인재양성및시험관리, 교육시설유지및장비확충, 인재원청사보수·보강, 일반운영비, 시설비(401-01)

붙임  1. 설계변경사유서 1부.

2. 공사 정산보고 1부.

3. 변경내역서(정산) 1부.

4. 설치 도면 1부.

5. 검증확인서 1부. 끝.

주무관	장재원		시설재무팀장	박계완		인재기획과장	05/19 원권식
협조자
시행	인재기획과-6909	(		)	접수		(		)
우	06756	서울특별시 서초구 남부순환로340길 58	/	http://hrd.seoul.go.kr
전화	02-3488-2052	/전송	02-3488-2346	/	ihe96@seoul.go.kr	/	부분공개(5)