문서번호	하천관리과-7581
결재일자	2016.5.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	하천계획팀장	하천관리과장		물순환안전국장
권혁정	심형보	이진용		05/19 권기욱
협 조

안양천권역(서울시구간) 하천기본계획 고시 계획

2016. 5.

물순환안전국

(하천관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

안양천권역(서울시구간) 하천기본계획 고시 계획

서울지방국토관리청에서 안양천권역 하천기본계획을 수립 완료함에 따라 우리시 지방하천인 도림천 등 6개하천에 대한 하천기본계획을 고시하여 하천관리에 철저를 기하고자 함

1		용역개요

❍ 용 역 명 : 안양천권역 하천기본계획 (서울시 구간 : 도림천 등 6개소)

❍ 용역기간 : ’10.10.18. ~ ’15.12.29.

❍ 용 역 비 : 2,773백만원

❍ 시행기관 : 서울지방국토관리청 (용역사 : 이산, 현대eng, 극동eng)

❍ 사업내용

- 안양천권역(총 20개 하천, L=117.53km)

※ 서울특별시 관할 하천 : 도림천 등 6개 하천 L=32.85km

2		추진경위

❍ ’10. 10. : 용역 착수 (서울지방국토관리청)

❍ ’12.  9. : 서울시구간 전문가 자문회의

❍ ’14.  8. : 지형도면 공고공람 및 주민열람 완료 (서울시)

❍ ’14.  9. : 서울시 지방하천관리위원회 심의 (보류)

❍ ’14. 12. : 서울시 지방하천관리위원회 심의 (가결)

❍ ’15. 12. : 용역 완료 (서울지방국토관리청)

❍ ’16.  4. : 고시 의뢰 (서울지방국토관리청→서울시)

3		고시 계획

□ 하천기본계획 고시 항목

1. 하천정비기본계획 수립

: 하천의 치수안전성 확보를 위한 홍수방어계획 수립

(홍수량, 홍수위, 계획하폭, 유역의 홍수방어시설별 홍수배분계획 등)

2. 지방하천의 지정·변경 및 해제 고시

3. 하천구역의 결정(변경·폐지) 및 지형도면 고시

4. 폐천부지 등 및 지형도면의 고시

: 하천을 관리하기 위한 경계 설정 등 토지이용 계획 수립

(하천구역 결정, 폐천부지, 지형도면 등)

□ 금회 고시계획

구 분	도림천	대방천	봉천천	오류천	시흥천	목감천
1. 하천정비기본계획 수립	○	○	○	○	○	×
2. 하천의 지정·변경 3. 하천구역 결정 4. 폐천부지 등 고시	○	○	○	○	○	○

※ 목감천의 대부분이 위치한 경기도(약 85%)에서 하천정비기본계획을 수립하여 고시(’16.5.13.)하였으며, 우리시에서는 경기도의 하천정비기본계획에 따른 하천구역 결정, 폐천부지 등 내용만 고시 예정

4		주요 고시내용

□ 하천정비기본계획

❍ 계획빈도 및 하구부 홍수량

- 하천설계빈도 상향 : 당초 50년 → 80~100년

하 천 명	기 점	종 점	유로연장 (km)	계획빈도(년)		비고
				기수립	금 회
도 림 천	관악구 신림동	안양천합류점	14.51	50	100
대 방 천	동작구 상도동	도림천합류점	7.43	50	80
봉 천 천	관악구 봉천동	도림천합류점	7.31	50	80
오 류 천	구로구 궁동	목감천합류점	5.67	50	80
시 흥 천	금천구 시흥동	안양천합류점	3.62	50	80

- 유역면적 및 홍수량 (하구기준)

하 천 명	유역면적 (㎢)	기본홍수량 (㎥/s)	계획홍수량 (㎥/s)	유역 및 홍수방어 시설별 홍수량 (㎥/s)	비고
도 림 천	42.50	765	716	49
대 방 천	7.65	157	119	38
봉 천 천	9.19	175	175	-
오 류 천	6.55	127	127	-
시 흥 천	4.61	114	114	-

❍ 주요시설물 계획

- 정비계획 (유역분담 홍수량 처리계획)

하천명	유역분담시설(방수로)				개수계획 연장 (km)				교량 (개소)
	구분	폭 (m)	연장 (km)	구간	합계	축제	보축	단면확장	재설치	신설
도림천	도림천	8.5	3	보라매공원 ~여의샛강	2,755	-	1,160	1,595	9	-
	관악산	3.5	3.2	서울대입구 ~보라매공원
대방천	-	4.0	1.3	상도동길 ~해군회관사거리	1,105	-	-	1,105	-	-
봉천천	-				130	-	-	130	-	-
오류천	-				3,530	820	395	2,315	1	-
시흥천	-				520	-	-	520	-	-

- 주요 **내용

· 방 수 로

구 분	도림천 방수로	관악산 방수로	대방천 방수로	비고
위 치	보라매공원 ~ 여의도 샛강	서울대입구 ~ 보라매공원	상도동길 ~ 해군회관사거리
규 모	D=8.5m L=3.0km	D=3.5m L=3.2km	D=4.0m L=1.3km
사업비	1,545억원	680억원	200억원
저감량 (m3/s)	93	27	43	설치지점

· 단면확장

구 분	도림천	대방천	봉천천	오류천	시흥천	비고
위 치	신림동 일원	상도동 일원	봉천동 일원	오류동 일원	시흥동 일원
규 모	단면확장 L=1.60km 하도 확장 B=22~59m → 30~59m	단면확장 L=1.11km 신설암거 매설 3.6×2.5×1련~3.6×3.5×1련	단면확장 L=0.13km 기존암거 증설 3.0×3.0×2련	단면확장 L=2.32km 신설암거 매설 3.0×2.5×1련 ~3.0×3.0×2련	단면확장 L=0.52km 신설암거 매설 4.0×3.5×1련
사업비	371억원	149억원	26억원	528억원	91억원

□ 하천구역 결정, 폐천부지 등 고시

❍ *****및 폐천부지***

<면적단위 : ㎡>

하천명	하천구역		폐천부지		비고
	필지수	면적	필지수	면적
도림천	499	785,645	146	71,092
대방천	217	99,508	8	2,729
봉천천	89	126,585	17	19,527
오류천	183	115,098	-	-
시흥천	98	30,800	-	-
목감천	112	119,381	17	6,327

※ 목감천은 경기도의 “하천정비기본계획” 수립에 따른 현황임

5		조치계획

❍ 고시번호 부여 의뢰 및 서울시보 게재 (’16.5.)

❍ 하천별 유역분담 홍수량 처리계획 수립 추진

- 하천 및 사업별 우선순위 검토 후 사업추진 (연차별 계획 수립 예정)

- 홍수방어계획에 많은 비용이 소요되므로 국가사업 추진 및 국비지원 요청

․방 수 로(도림천, 대방천)                 : 국가사업 추진

․단면확장(도림천, 오류천, 시흥천, 대방천) : 국비지원 요청 (50%)

붙임 : 1. 위치도 1부.

2. 하천기본계획 고시문(안) 1부.

3. 토지세목조서 1부.

4. 주요 홍수방어대책 1부. 끝.