문서번호	시설보수과-3507
결재일자	2016.5.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	동부도로사업소장
정병윤		장형상	05/19 임대성
협 조
	주무관			나철흠

탄천교 보수공사 발주관련 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

동부도로사업소

(시설보수과)

탄천교 보수공사 발주관련 검토 보고

Ⅰ		공사현황

○ 공 사 명 : 탄천교 보수공사

○ 공사기간 : 2016. 6 ~ 10

○ 공사개요

- 교면방수 및 아스콘포장 : 50.4a

- 신축이음장치 교체 : 92m

○ 총공사비(발주 전 개략공사비) : 910,000천원

- 도  급  비 : 779,829천원

- 관급자재비 : 112,585천원

- 폐기물처리비 : 17,586천원

○ 공   정 : 현재 계약심사 의뢰 준비 중

Ⅱ		보고내용(문제점)

○ 교면방수공법 심의결과(교량안전과-7689호)

- 선 택 안 : 슈프림데크코트공법

- 심의결과 : 조건부 통과

· 부식이 심한 부분 고탄성아크릴 부분검토 적용 필요

· 추적조사 실시 필요

○ 공단감독 위탁 재검토

- 공사기간 3개월(90일) 미만은 공단감독 위탁 제외

- 단순공종(교면방수및포장, 신축이음교체)으로 단기간내  공사완료 가능

○ 부족예산 확보방안 검토

- 예산부족으로 교면방수 및 포장구간 일부 설계 미반영(삼성병원방향, A1~P1)

· 전체 55.0a, 설계반영 50.46a, 설계미반영 4.54a(16m×28.3m)

· 부족공사비 59,600천원

Ⅲ		시행계획(처리방안)

○ 교면방수공법 심의결과에 따라 아스팔트콘크리트 절삭과 동시 바닥판 열화상태를 추적조사하여 부식이 심한 부분이 있을 경우 바닥판 보수 후 교면방수 및 포장공사 시행

○ 공단위탁 재검토 사항은 서울시 공사감독업무 위수탁협약 내용 중 공사기간이 3개월 미만은 공단감독 위탁 제외키로 되어있고, 또한 본공사 공종이 단순하여 단기간(착공일로부터 90일 이내)에 완료가 가능할 것으로 판단되므로 공단감독 위탁 제외하고 자체감독 시행

○ 부족예산에 대하여는 추후 낙찰차액을 활용하여 공사 시행

Ⅳ		조치의견

○ 위와 같은 사항으로 우선 계약심사 후 공사 발주코자 함.

붙 임  1. 관련공문 사본 1부.

2. 설계도면(교면방수 및 포장 제외구간) 1부. 끝.