문서번호	토목부-9962
결재일자	2016.5.19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	터널건설과장	토목부장
이정원	권혁대	05/19 김영수

감리용역 설계변경 및 준공기간 연기 검토보고

(용비교~행당중간 도로개설공사 전면책임감리용역)

2016. 5.

도시기반시설본부

(토목부)

감리용역 설계변경 및 준공기간 연기 검토보고

(용비교~행당여중간 도로개설공사 전면책임감리용역)

“용비교~행당여중간 도로개설공사”전면책임감리용역에 대해 물가변동에 의한 계약금액 조정 및 원활한 감리수행을 위한 용역 준공기간 연기 검토 보고임

Ⅰ		관 련 근 거

○ 토목부-4543호(2016.3.10.): 물가변동으로 인한 계약금액 조정 검토보고

○ 토목부-9288호(2016.5.11.): 예산조정(통계목 변경) 현안 검토보고

Ⅱ		용 역 개 요

○ 용 역 명 : 용비교~행당중간 도로개설공사 전면책임감리용역

○ 규    모 : 도로확장 및 개설 L=719m, B= 확장 5.2m(전체 26.4m)

○ 용역기간 : 2007. 1.10. ~  2016. 6.30.

○ 용 역 비 : 2,508백만원

○ 감 리 사 : ㈜평화엔지니어링, ㈜ 선진엔지니어링

○ 시 공 사 : 한신공영㈜

Ⅲ		보 고 내 용

○ 감리용역 설계변경 사유

-‘16년 물가변동으로 인한 계약금액 증액분 반영 : 증 7,500천원

-‘15년 감리기간(2개월)연장에 따른 조정으로‘16년 감리원 투입

계획 변경에 의한 설계변경

○ 용역기간 연기 사유

- 잔여 공종감리 및 준공(‘16. 5. 31.)이후 인수·인계 등 사후관리에 따른 연기

- 원활한 감리수행을 위해 차수(9차)와 총차 용역기간 동일하게 조정

○ 용역비 및 용역기간 변경내역

(단위: 천원)

구 분		당 초	변경	증/감	비고
용역비	총괄	2,508,500	2,516,000	증)7,500
	9차	282,000	338,000	증)56,000
용역 기간	총괄	‘07. 1.10.~‘16. 6.30.	‘07. 1.10.~‘16. 6.30.	-	변경없음
	9차	‘16. 1. 1.~‘16. 5.19.	‘16. 1. 1.~‘16. 6.30.	증)42일

Ⅳ		조치 계획

○ 물가변동으로 인한 계약금액 조정 및 감리원 투입계획 변경에 따른 원활한 용역수행을 위해 설계변경 하고자 하며,

○ 시설공사 준공후(2016.5.31.)인수·인계 등 사후관리에 따른 절대  감리기간이 부족하여 용역 준공기간을 연기하고자 함.

- 당초 : 2016. 5.19. → 변경 : 2016. 6.30.

- 지체상금 부과여부 : 미부과

붙임 : 1) 관련근거 검토 보고서 각 1부.

2) 설계변경 내역서(총괄 8회 및 9차 1회) 각 1부.

3) 준공기한 연기의뢰서 1부.   끝.