문서번호	방재시설부-7391
결재일자	2016.5.19.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		공원시설과장	방재시설부장
박계현		김인숙	05/19 임춘근
협조
	주무관		손병도

「경춘선 폐선부지 공원조성공사」

폐기물 처리 실정보고 검토 보고

2016. 05

도시기반시설본부

방재시설부

『경춘선 폐선부지 공원조성공사』

폐기물처리 실정보고  검토 보고

「경춘선 폐선부지 공원조성공사」 구간 내 산재되어 있는 폐기물(폐합성수지)

처리에 대한 실정보고 검토 보고임.

▶ 관련공문 : 선진경춘감-16-279호(2016.05.16)

Ⅰ

공사개요

○ 공 사 명 : 경춘선 폐선부지 공원조성공사(2단계)

○ 위    치 : 노원구 경춘철교 ~ 산업대3길 고가철교

○ 규    모 : 공원조성 연장(L) 1.1km, 면적(A) 53,860㎡

○ 사업기간 : ‘15.10.6 ~ ’16.10.3 (1차수 ‘15.10.6 ~ ’16.8.5)

○ 공 사 비 : 5,445백만원

Ⅱ

실정보고 사유

○ 『경춘선 폐선부지 공원조성공사』 구간 내 폐합성수지 등의 폐기물이 산재     하여 공원조성을 위하여 폐기물 처리 선행 필요

○ 현황사진

○ 폐기물 처리 수량 검토

구 분	단 위	당초	변경	비 고
폐합성수지 소운반	㎥		130
혼합폐기물 상차	㎥		130
폐기물 처리	ton		60	폐합성수지 단위중량 0.46ton/㎥

○ 공사비 검토

구분	규격	단위	수량	단가	금액	비고
직접공사비					1,162,863
1) 폐기물 소운반		㎡	130.41	6,498	847,403
2) 폐기물 상차			130.41	2,419	315,460
2. 제경비					362,283
3. 폐기물처리 (운반비 포함)	폐합성수지	ton	59.99		16,924,943
4. 공급가액					18,450,089
5. 부가가치세					1,845,008
6. 도급액					20,295,090

○ 단가적용 검토

· 폐기물 소운반 및 상차 : 신규단가에 대하여 낙찰율(85.496%) 적용

· 폐기물 처리 : 관련폐기물 면허등록업체 대상으로 비교견적(2개사) 단가 적용

Ⅲ

건설사업관리기술단 검토의견

○ 『경춘선 폐선부지 공원조성공사(2단계)』 시행 중 상기와 같이 공사 구간 내 야적된 폐기물(폐합성수지) 처리 실정보고에 대하여 검토한 결과, 원활한 공원조성공사를 위하여 폐기물 처리 선행이 필요하고, 폐기물 처리 완료 후 계근 물량에 따라 정산 처리함이 적절하다고 판단됨.

Ⅳ

검토결과

○ 『경춘선 폐선부지 공원조성공사(2단계)』 구간 내 폐기물 처리에 대한 건설사업관리기술단의 검토의견이 타당하다고 판단되어 승인 통보코자 하며, 차후 설계변경 시 반영토록 조치코자 함.

붙  임 : 실정보고서 1부.  끝.