문서번호	시설보수과-2231
결재일자	2016.5.19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
김석수		강병수	05/19 이성재
협조

2016년 유입 및 방류유량계        교정검사 용역 계약변경 시행 보고

2016. 05.

중랑물재생센터

(시설보수과)

2016년 유입 및 방류유량계        교정검사 용역 계약변경 시행 보고

위 용역 건과 관련하여 아래와 같이 계약변경 사유가 발생 계약기간을 변경  하고자 보고 드림

Ⅰ		계 약 현 황

□ 계약건명

- 2016년 유입 및 방류유량계(18개소)교정검사 용역

□ 계약업체

- ㈜씨엠엔텍 대표 : 김태곤

□ 계약기간

- 계 약 일 : '16.05. 04., 계약기한 : '16.05. 18.

□ 계약금액

- 금13,365,000원(금일천삼백삼십육만오천원)

Ⅱ		계약 변경 내용

□ 변경내역(계약기간변경)

구분	계약기한	계약금액	비고
당초	2016년 05월 18일	금13,365,000원	18개소 교정검사
변경	2016년 06월 10일

□ 변경사유

- #2처리장 2개의 유입관로 중 침사지 2라인 침사인양설비 수리보수를 위해 1개의 관로쪽으로만 하수가 유입되고 있어 나머지 유입관로는 비교측정이 불가하여 침사인양설비 수리보수 완료시까지 계약기간 변경 필요

※ 관련문서 : 시설보수과-953(2016.03.17.)[2처리장 침사인양설비 수리 보고]호

- #3처리장 B계열 유입 유량계 센서고장으로 현재 정확한 유량 측정이 불가하여 유량계 센서 교체 후 교정작업 필요

Ⅲ		행 정 사 항

□ 계약변경 시행. 끝.