투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부도로사업소
수신	서 울 특 별 시 장(보행자전거과장)
(경유)
제목	도심권역내 자전거횡단도 교통안전표지 설치공사 설계변경 요청

1. 보행자전거과-6306호(2016.5.4.)와 관련입니다.

2. 도심권역내 자전거횡단도 설치공사와 관련하여 현장 사전 조사결과 교통안전표지 설계변경이 요구되어 조치를 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 사 업 명 : 자전거도로 유지보수(자전거횡단도 설치)

나. 공사공종 : 교통안전표지 설치공사

다. 소요예산 : 금8,200,000원

라. 설계변경 요청사항

교차로명	변경전	변경후	사 유
숭례문교차로	- 부착식 15개소	부착식 11개소 정주식 4개소	4개소 부착식 설치 불가
시청앞	- 부착식 12개소 우회전금지 1개소	부착식 11개소 정주식 1개소 우회전금지 제외	1개소 부착식 설치 불가 - 우회전금지표지 기설치

첨 부 : 현황조사결과 1부(숭례문,시청앞). 끝.

	서울특별시 서부도로사업소장
주무관	장병준		기전과장	05/19 양영민
협조자
시행	기전과-5369	(		)	접수		(		)
우	03918	마포구 가양대로 203(상암동 835)	/	http://seoul.go.kr
전화	02-300-8406	/전송	02-300-8410	/	hijun39@seoul.go.kr	/	대시민공개