문서번호	공원녹지정책과-7587
결재일자	2016.5.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	공원관리팀장	공원녹지정책과장
박진영	문길동	05/19 최윤종

월드컵공원 중장기 운영전략 연구 용역

학술용역 준공기한 연장계획

2016. 5

푸 른 도 시 국

(공원녹지정책과)

- 월드컵공원 중장기 운영전략 연구 용역 -

학술용역 준공기한 연장계획

「월드컵공원 중장기 운영전략 연구용역」의 과업기간을 아래와 같이 연장하여 원활한 과업 수행 및 용역의 완성도를 높이고자 함

□ 용역개요

○ 사 업 명 : 월드컵공원 중장기 운영전략 연구용역

○ 계약기간 : ’15. 11. 30 ~ ’16. 5. 27.

○ 계약자(대표) : (사)생명의숲국민운동

○ 과업내용

- 공원의 안정화 현황과 환경 생태적 변화추이 예측

- 지속 가능한 관리 방안 및 도입 가능 시설 범위 검토

- 주변 여건과 시대적 변화에 발맞춘 시민 참여 활성화 운영방안 마련

- 공원 운영 가이드 라인 제시 및 중장기 운영전략 수립

○ 계약금액 : 71,900천원

□ 추진경위

○ ’15. 11. 30 : 용역 착수

○ ’15. 12. 16 : 착수 보고

○ ’16.  3.  29 : 중간 보고

○ ’16.  5.  2 ~ 5. 16 : 월드컵공원 운영 관련 포럼 개최(3회)

□ 준공 기한 연기

○ 연장 내역

변경내용	당 초	변 경	비 고
계약기간	’15. 11. 30 ~ ’16. 5. 27	’15. 11. 30 ~ ’16. 7. 26	60일 연장
계약금액	71,900,000원	71,900,000원	변동 없음

○ 연장 사유

- 월드컵공원의 비전과 중장기 운영 전략 설정을 위한 3차례의 포럼 개최 이후        후속 조치를  위한 시일 소요

□ 전문가, 지역주민, 시민단체, 공무원 등이 참석하여 공원 이용 수요와 합리적

이용방안, 비전 설정과 운영원칙 등의 주제를 가지고 3차례의 포럼을 가졌으며

포럼 이후 후속 조치(의견 수렴 및 결과 도출)를 위한 시일 소요

- 본 용역의 원활한 과업 수행 및 완성도를 제고하고자 준공 기한 연장이 불가피함

○ 연기 귀책소재 : 서울특별시

○ 지체상금 부과여부 : 미부과

□ 향후계획

○ 계약자와 용역기한 연장 합의

○ 용역기한 연장 요청(재무과)

붙  임 : 1. 준공기한 연기 의뢰서 1부.

2. 합의각서 1부(별첨).   끝.