함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강동수도사업소
수신자	행정지원과장
(경유)
제 목	준공기한 연기에 따른 계약의뢰

우리사업소에서 시행하는 아래 용역에 대하여 준공기한을 아래와 같이 연기요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가.  용 역 명 : 거마가압장~군부대간 송배수관 정비공사 교통소통대책 수립용역

나. 계약상대자 : 에이스톤엔지니어링㈜  대표 장명학

다. 계약금액 : 금16,860,000원

라. 계약기간 : (당초) 2016.3.18.~2016.5.20.

(변경) 2016.3.18.~2016.6.10.

마. 연기사유 귀책소재 : 강동수도사업소

바. 지체상금 부과여부 : 미부과

붙   임  1. 준공기한연기 보고서 및 방침서 각1부.

2. 합의서 1부.  끝.

	급수운영과장
주무관	이덕규		주무관	김용현		급수운영과장	05/19 전명수
협조자
시행	급수운영과-9281	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 51	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02) 3146-5144	/전송	02) 3146-5189	/		/	대시민공개