투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	중부공원녹지사업소
수신	공원운영과장
(경유)
제목	준공기한 연기요청(장충단공원 유아숲체험장 조성공사 실시설계용역)

『장충단공원 유아숲체험장 조성공사 실시설계용역』과 관련하여 다음과 같이 준공기한을 연기요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 장충단공원 유아숲체험장 조성공사 실시설계용역

나. 도 급 자 : 민앤그린조경설계사무소  대표 연혜진

다. 용역기간 : 2016. 3. 21. ~ 5. 19.

라. 용 역 비 : 금4,630,780원(변경없음)

마. 준공기한 연기

-당 초 : 2016. 3. 21. ~ 2016. 5. 19.

-변 경 : 2016. 3. 21. ~ 2016. 5. 31.

붙 임 : 검토보고서 1부.  끝.

	시설과장
주무관	황윤채		조경팀장	남상국		시설과장	05/20 代김경수
협조자
시행	시설과-3687	(		)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 삼일대로 231, 중부공원녹지사업소 시설과	/	http://parks.seoul.go.kr
전화	02-3783-5968	/전송	02-3783-5969	/		/	대시민공개