문서번호	시설관리과-10128
결재일자	2016.5.20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	주무관	시설관리과장	북부수도사업소장
정성식	김만재	장종욱	05/20 박용진
협 조

『2015년 수유 1동 외 8개동 상수도 공사(연간 단가)』

설계변경 및 계약 금액 조정 시행

2016. 5.

시설관리과

『2015년 수유 1동 외 8개동 상수도 공사(장기 계속 단가계약)』

설계변경 및 계약 금액 조정 시행

우리사업소에서 시행중인 『2015년 수유 1동 외 8개동 상수도 공사(장기 계속 단가계약)』 의 시공물량 증․감 및 신규공종 발생 등으로 설계변경 및 계약금액 조정이 요구됨에 따라 본부에 『설계변경 심의』을 요청 예산집행의 효율성 및 적정한 공사집행을 도모하고자 함.

※ 관련 근거 : 『'16년 계약심사 대상 사업 알림』 (재무회계과-434): 연간단가계약 공사 도급비 증액시

공사현황

공 사 명 : 2015년 수유 1동 외 8개동 상수도 공사(장기 계속 단가계약)

공사개요

관 경	당 초	변 경	증·감
13~50mm	1,119m	1,246m	증)127m
80~300mm	313m	78m	감)108m

공사기간 : 2015.05.15. ~ 2016.06.30

도 급 자 : 주건엔지니어링(주)   대표 홍성연

도 급 비

- 당 초 : 金 오억천삼백사십일만삼천칠백구십원정(\513,413,790)

- 변 경 : 金 오억육천백오십만육천원정(\561,506,000)

- 증 액 : 金 사천팔백구만이천이백십원정(\48,092,210)

※도급비 증액(9.36%)

보고내용

설계변경 사유

- 토공, 부설공, 구조물공 등 시공물량 증․감 및 신규공종 발생에 따른 변경

- 건강,연금,노인장기요양보험료 및 부지임대료 정산에 따른 변경

시공물량 (증.감)현황

구경 (mm)	연 장 (m)		증 ․ 감	비 고
	당 초	변 경
13~50mm	1,119	1,246	증)127
80~300mm	313	78	감)235
계	1,432	1,324	감)108

계약금액 변경(조정) 내역

구 분	당 초	변 경	증․감	비 고 (비율)
총공사비	618,413,790	653,506,000	증) 35,092,210	증) 5.6%
도 급 비	513,413,790	561,506,000	증) 48,092,210	증) 9.3%
관급자재비	105,000,000	92,000,000	감) 13,000,000	감) 12.3%

공종별 변경내역

구 분	당 초	변 경	증․감	비 고 (비율)
토공	94,836,139	103,027,824	증) 8,191,685	증) 8.6%
부설공	86,496,741	114,829,004	증) 28,332,263	증)32.7%
구조물공	11,227,399	16,741,692	증) 5,514,293	증)49.1%
부대공	47,753,217	51,713,503	증) 3,960,286	증) 8.2%
사급자재비	87,184,443	80,917,641	감) 6,266,802	감) 7.1%

조치의견

위와 같이 물량 증․감이 발생되어 변경물량 공종에 대하여 계약단가로 적용하고,         신규공종에 대하여는 설계단가에 낙찰율(86.75%)을 적용코자 하며,

설계변경사항에 대하여 적법성여부 등을 검토 및 심의하여 설계변경에 반영하고자       상수도사업본부(재무회계과)에 계약금액 조정검토 의뢰 후 재계약하여 공사시행에       만전을 기하고자 합니다.

첨부 : 1. 설계변경내역서 1부.   끝.