문서번호	설비부-8020
결재일자	2016.5.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시책사업과장	설비부장
윤대영		代김원태	05/20 권오식
협조

『용두3 빗물펌프장 신설공사』

관급자재 납품기한 연기 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 05.

도시기반설비본부

(설비부)

『용두3 빗물펌프장 신설공사』

관급자재 납품기한 연기 검토보고

우리 본부에서 시행 중인『용두3 빗물펌프장 신설 공사』와 관련, 관급자재 설치시기 미도래에 따른 납품기한 연기 검토 결과를 보고 드림.

공사개요

❍ 공 사 명 : 용두3 빗물펌프장 신설 공사

❍ 위    치 : 동대문구 용두동 255

❍ 규    모 : 펌프일체형수문 1식(37㎾ × 2대, 45㎾ × 2대)

수전설비: 저압 3상 4선 380/220V 196㎾ 2회선

❍ 공사기간 : 2013. 04. 15. ~ 2016. 06. 30.

관련근거

❍ 2016.05.19. : 관급자재 납품기한 연기검토보고 제출(공사감독3처-3525)

관급자재 계약(변경)현황

구 분	계약번호	계약업체	계약금액(원)	납품기한		비 고
				당 초	변 경
펌프일체형 수문1식 구매	1215111400	하서산업(주)	금840,000,000	‘16.05.30.	‘16.06.30.	계약금액변경없음
스크린 제작 구매	12152267900	사회복지법인 온누리유공자복지회	금27,000,000	‘16.05.30.	‘16.06.30.

감리 연기검토 보고

❍ 연 기  사 유 : 선행 공종 준공 일정상 관급자재 납품시기 미도래

❍ 귀 책 소 재 : 도시기반시설본부

❍ 지체상금 부과여부 : 미부과

보고자 의견

❍ 관급자재의 납품기한 연기가 타당하므로 납품기한을 연기조치하고 공정관리에 만전을 기하고자 함.

따로붙임 : 관급자재 납기연장 요청 공문  각 1부.  끝.