투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울대공원
수신자	총무과장
(경유)
제 목	『황새마을외2개소 지붕및구조체 보수보강공사』설계변경 시행

1. 시설과–3148(2015.05.16)호와 관련입니다

2. 우리 대공원에서 시행중인“황새마을외2개소 지붕및구조체 보수보강공사”와 관련하여 공사변경에 대하여 아래와 같이 설계변경 시행코자 하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 황새마을외2개소 지붕및구조체 보수보강공사

나. 공사금액 : 금299,700,000원

다. 공사기간 : 2016. 03. 10. ~ 2016. 06. 08

라. 계 약 자 : ㈜하현태크 대표 임하태

마. 예산과목 : 서울대공원, 공원이용시민만족도 향상, 동물사관리 기능 및 야생동물종보존, 공원 안전시설 보수 및 정비, 시설비

바. 설계변경 내역

(단위 : 원)

구 분	변 경 전	변 경 후	비 고
도 급 비	260,691,000	299,700,000	증 39,009,000

사. 설계변경 사유 : 공사물량 증·감 및 제경비 정산 등

붙임 : 1. 실정보고에 따른 설계변경 검토 보고서 1부. 끝.

	관리부장
주무관	이상국		시설과장	공헌구		관리부장	05/20 심상원
협조자	★주무관	오창호		주무관	김현정		전략기획실장	윤대진
시행	시설과-3261	(		)	접수		(		)
우			/	http://grandpark.seoul.go.kr
전화	02-500-7410	/전송	02-507-7230	/		/	대시민공개