문서번호	도로보수과-4779
결재일자	2016.5.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	북부도로사업소장
최병수		이석재	05/23 노영석
협조

2016년 포장도로 긴급복구공사

설계변경 시행계획(1회)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

북부도로사업소

도로보수과

「2016년 포장도로 긴급복구공사(연간단가)」

설계변경 시행계획(제1회)

「2016년 포장도로 긴급복구공사」 시행중 시공물량 증․감에 따른 변경사항이 있어 아래와 같이 설계변경 시행코자 함.

1. 공사현황

○ 공 사 명 : 2016년 포장도로 긴급복구공사(연간단가)-북부

○ 공사개요 : 소규모포장복구 34a, 절삭 덧씌우기 258a, 출동 80hr

○ 공 사 비 : 1,502,869,930원

- 도급비 665,169,930원, 관급비 637,700,000원, 이전비 200,000,000원

○ 공사기간 : 2016.02.19. ~ 2016. 12. 31.

○ 계약상대자 : ㈜청람이앤씨   대표 김 도 성

2. 설계변경 사유

○ 포장 불량구간 정비에 따른 공종별 정비물량 조정

- 당초 : 소규모 포장복구 34a, 절삭 덧씌우기 258a, 출동 80hr

- 변경 : 소규모 포장복구 52a, 절삭 덧씌우기 230a, 출동 80hr

○ 주요 변경 내용

구 분	규격	단위	당초	변경	증․감	비고
소규모포장복구	야간,t=5cm	a	26	31	증 5
소규모포장복구	야간,t=10cm	a	6	6	-
소규모긴급복구	야간,t=20cm	a	2	15	증 13
절삭후덧씌우기	야간,t=5cm	a	226	222	감 6
절삭후덧씌우기	야간,t=10cm	a	32	8	감 24
포장장비 수송	포장장비이동	회	7	33	증 26

3. 설계변경 금액

(단위 : 원)

구 분		설계변경 금액		증․감	비 고
		당 초	변 경
총공사비		1,502,869,930	1,502,869,930	-
도급비	공급가액	604,699,937	836,220,000	증)231,520,063
	부 가 세	60,469,993	83,622,000	증)23,152,007
	계	665,169,930	919,842,000	증)254,672,070
관 급 비		637,700,000	383,027,930	감)254,672,070
이 전 비		200,000,000	200,000,000	-

4. 조치의견

○ 상기 보고내용과 같이 설계변경 시행후 공사추진에 철저를 기하고자 함.

따로붙임  변경내역서 1부.  끝.