문서번호	토목부-10231
결재일자	2016.5.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도시고속도로과장	토목부장
김구		명경출	05/23 김영수
협조
	주무관		장종환

건설폐기물(소각,혼합) 준공기한 연기 검토 보고

【강남순환도시고속도로 8공구 건설공사】

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 5.

도시기반시설본부

토 목 부

건설폐기물(소각,혼합) 준공기한 연기 검토보고

【강남순환도시고속도로 8공구 건설공사】

「건설폐기물의 재활용 촉진에 관한 법률 제15조제1항 및 시행령 제11조」에 의거 분리 발주하여 시행중인 강남순환도시고속도로 8공구 건설공사 건설폐기물 처리용역에 대한 공기연장 사유가 발생함에 따라 처리방안을 검토하여 보고 드림

※ 관련근거 : 동기공 2016-1757호(2016.05.16.)

1		용역개요

❍ 용 역 명 : 강남순환도시고속도로(8공구)건설공사 건설폐기물(소각,혼합)처리용역

❍ 계 약 자 : ㈜진흥중공업  대표 박찬양

❍ 계약금액 : 금208,290천원 (4차: 금50,727천원)

❍ 용역기간

- 총 괄 : 2012.04.05. ~ 2016.05.30.

- 4 차 : 2016.01.01. ~ 2016.05.30.

2		폐기물 처리량 및 용역비 현황

구 분	예 산 (천원)	수 량(TON)			비 고
		소각폐기물	혼합폐기물	계
총 괄	208,290	1,158	743	1,901
1차 (기 준공)	64,000	267.92	481	748.92
2차 (기 준공)	4,000	17	29.4	46.4
3차 (기 준공)	89,563	535.65	211.15	746.8
4차 (금 회)	50,727	337.43	21.45	358.88

3		준공기한 연기 검토

❍ 용역기간 변경 내용

구 분		용역비	착공일	준공예정일	비 고
총괄	당 초	208,290,000	2012. 04. 05.	2016. 05. 30.
	변 경	208,290,000	2012. 04. 05.	2017. 05. 30.
	증･감	-		증 365일
4차	당 초	50,727,000	2016. 01. 01.	2016. 05. 30.
	변 경	50,727,000	2016. 01. 01.	2016. 12. 31.
	증･감	-		증 215일

❍ 준공기한 연기사유

- 강남순환 8공구 과천시 구간의 보상물건 수용재결 중으로 지장물 미철거에 따른 용역기간 연장

❍ 연기 귀책소재 : 시행청

❍ 지체상금 부과 : 미부과

4		조치계획

❍ 본공사 구간의 지장물 철거 미착수에 따른 폐기물처리 용역기간 연장

- 총괄 : 2016.05.30. → 2017.05.30.

- 4 차 : 2016.05.30. → 2016.12.31.

❍ 용역기간 조정하고 본 사항에 대해 도급자에 통보하여 폐기물처리용역 변경 계약하고자 합니다.

【붙임】 1. 감리 검토의견서 1부.

2. 설계내역서 1부.  끝.