투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	관급자재 납품기한 연기의뢰(북부여성창업플라자조성전기공사-조명기구)

우리부에서 시행중인 『북부여성창업플라자 조성 전기공사』에 소요되는 관급자재 납품기한을 아래와 같이 연기 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

1. 공 사 명 : 북부여성창업플라자 조성 전기공사

2. 계약현황 및 납품기한 연기요청 내용                  (조달수수료 포함금액임)

납품요구번호	품명	계약금액	계약업체	계약일자	납품기한
					당 초	변 경
12-16-2-07663-00	LED 조명기구	62,463,060	㈜금경라이팅	‘16.02.22.	′16.05.30	‘16.12.31
12-16-2-07661-00	“	42,374,740	㈜금경라이팅	‘16.02.22	‘16.09.29	‘16.12.31
12-16-2-07665-00	“	5,877,000	㈜금경라이팅	‘16.02.22	‘16.09.29	‘16.12.31
12-16-2-07662-00	“	6,835,410	㈜디케이라이텍	‘16.02.22	‘16.09.29	‘16.12.31
12-16-2-07664-00	“	4,809,300	㈜영공조명	‘16.02.22	‘16.09.29	‘16.12.31

3. 연기사유 : 설치시기 미도래

4. 계약금액 및 수량 : 변경없음

5. 지체상금 부과여부 : 미부과

붙임  관련공문 및 합의각서 각 1부.  끝.

	설비부장
주무관	배수웅		건축설비과장	김영수		설비부장	05/23 권오식
협조자
시행	설비부-8114	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동 96번지) 프리미어플레이스 빌딩 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8626	/전송	02-3708-8659	/	swoong@seoul.go.kr	/	부분공개(5)