투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	건설총괄부장
(경유)
제목	준공기한 연기 요청(신사사거리~고양시계간 도로개설 통신공사)

우리 본부에서 추진하고 있는「신사사거리~고양시계간 도로개설 통신공사」준공기한을 아래와 같이 연기요청 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 신사사거리~고양시계간 도로개설 통신공사

나. 계 약 자 : ***************

다. 계약금액 : 총차-324,983,000원(2차-304,983,000원)

라. 준공기한 연기내용

구 분	당 초	변 경	비 고
준공기한	’16.05.26	’16.09.26	증123일

마. 연기사유 : 선행공사(토목) 연기에 따른 후속 통신공사 연기

바. 계약금액 : 변동없음

사. 지체상금 부과여부 : 미부과

붙임 : 준공기한 연기검토보고서 및 합의서 1부. 끝.

	설비부장
주무관	박병환		건축설비과장	김영수		설비부장	05/23 권오식
협조자
시행	설비부-8116	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02)3708-8628	/전송	02)3708-8659	/	pbhw2002@seoul.go.kr	/	부분공개(6)