문서번호	급수운영과-10062
결재일자	2016.5.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
제영도		05/23 代이승우
협 조

공사 실정 보고 (역삼동 720번지외 2개소 배급수관 정비공사)

2016년  5월

강남수도사업소

(급수운영과)

공사 실정 보고(역삼동 720번지외 2개소 배급수관 정비공사)

명에 의하여 “역삼동 720번지외 2개소 배급수관 정비공사”의 공사감독 중 아래와 같은 설계변경 사항이 발생하여 보고 드림.

□ 공사 현황

○ 공 사 명 : 역삼동 720번지외 2개소 배급수관 정비공사

○ 공사개요 : D=20~300mm, L=1,824m

○ 공사기간 : 2016.5.3. ~ 10.29.

○ 계약금액 : 487,081,330원

○ 시 공 사 : 청풍건설(주) 대표 박정일

□ 보고 내용

○ 공사 구간 연장 변경(축소)

- 상기 공사구간중 1구간 시점부의 기존 상수도관이 당초 확인한 사실과 다르게 기개량되어 있는 것으로 확인되어 기개량된 구간에 대하여는 배수관 부설을 취소하여야할 실정임.

- 기개량된 구간 : 역삼동 720-7번지앞 D=300mm, L=40m

○ 배수관 분기부 구경 및 위치 변경

- 1구간 : 역삼동 720-7번지 D=100mm 분기가 기개량된 상수도관(D=300mm)에서 분기되어 있어 분기공사가 필요없는 실정임.

- 2구간 : 역삼동 784-40번지 D=100mm 분기를 소블록내의 공급체계에 맞도록 배수관 분기를 확대(100⇒150)하여야 할 실정임.

- 3구간 : 역삼동 733-19번지 D=250mm 분기는 관급자재의 수급이 되지 않아 배수관 분기를 확대(250⇒300) 변경하여야 할 실정임.

○ 공사 위치도

- 1구간 : 공사구간 연장 및 분기위치 변경

- 2구간 : 배수관 분기위치 변경

- 3구간 : 배수관 분기위치 변경

□ 조치 의견

○ 변경 사항

구간	위 치	내 용	변경 사항		비고
			당 초	변 경
1구간	역삼동 720-7~731	부설연장 변경	D=300mm, L=460m	D=300mm, L=420m
1구간	역삼동 720-19	분기 위치 변경	역삼동 720-7앞	역삼동 720-7앞
2구간	역삼동 784-4	분기 구경 변경	D300/100 분기	D300/150 분기
3구간	역삼동 733-19	분기 구경 변경	D300/250 분기	D300/300 분기

○ 상기 내용에 대한 변경사항을 감리사인 서울특별시 시설관리공단에 지시하여 공사감독에 만전을 기하고자 합니다.  끝.