문서번호	토목부-10277
결재일자	2016.5.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		토목설계과장	토목부장
윤창렬		여용석	05/23 김영수
협조
	주무관		박현용

설계용역 정산에 따른 실정보고

[한강상교량 연결램프 구조개선(강북지역) 실시설계]

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 5

도시기반시설본부

(토 목 부)

설계용역 정산에 따른 실정보고

2015. 1. 6. 착수하여 추진중인 「한강상교량 연결램프 구조개선(강북지역) 실시설계용역」에 대하여 실 정산에 따른 용역비 변경(감)사항이 있어 이에 대한 보고임.

용역개요

용역명 : 한강상교량 연결램프 구조개선(강북지역) 실시설계

위  치 : 서울특별시 용산구 한남동 한남대교 북단 일대

규  모 : 진출입 램프 설치

- RampA(L=839m), RampB(L=555m)

기  간 : 2015. 1. 6. ~ 2016. 5. 31.

용역비 : 996,600천원

용역업체 : 극동엔지니어링(주)외 3

용역추진현황

2014.12.29 : 용역 계약 체결

2015. 1. 6 : 실시설계 착수

2015. 4. 8 : 1차 주민설명회

2015. 5.19 : 2차 주민설명회

2015.10. 8 : 설계자문회의 1차(노선 및 계획자문)

2015. 11~12: 측량 및 지반조사

2015.12. 4 : 서울시 포럼개최

2016. 2.23 : 철도횡단 심의

2016. 3.25 : 특정제품선정심사위원회

2016. 5.11 : 건설기술심의

용역비 정산 내용

변경내역

(단위 : 원)

구 분	계약금액			비 고
	당초	변경	증·감
1.측량비	53,047,000	53,047,000	-
2.지반조사비	120,945,000	120,135,000	(감)810,000
3.교통조사비	5,200,000	5,200,000	-
4.실시설계비	677,631,000	677,631,000	-
5.지하매설물조사비	35,095,000	29,218,000	(감)5,877,000
6.CG작업비	4,400,000	4,400,000	-
7.손해배상공제료	4,257,000	4,225,000	(감)32,000
8.설계자문비	2,400,000	1,000,000	(감)1,400,000
9.설계경제성 분석 검토비	3,800,000	0	(감)3,800,000
소계	906,775,000	894,856,000	(감)11,919,000
적용	906,000,000	894,000,000	(감)12,000,000
10.부가가치세	90,600,000	89,400,000	(감)1,200,000
총계	996,600,000	983,400,000	(감)13,200,000

변경사유

1. 지반조사 수량변경에 따른 설계내역서 변경

- 폐공처리 미실시한 12개소는 수상구간으로 폐공처리가 불가능하여 이에 대한 수량변경 필요 (폐공처리 28개소 ⇒ 16개소)

2. 지하매설물조사 수량변경에 따른 설계내역서 변경

- 지하매설물조사 계획 대비 줄파기 실 수량 정산에 따른 변경 (토사 줄파기 90m ⇒ 70m)

3. 설계자문비

- 설계자문 3회 예정에서 1회 수행으로 내역서 변경

4. 설계경제성 분석 검토비

- 설계감리(설계VE 포함) 별도 발주로 인해 설계감리업체인 (주)유신에서 설계적정성 분석 검토 수행으로 전액 감 처리

향후 추진계획

- 2015. 5. : 설계변경 재계약 및 용역 준공처리.   끝.