투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시체육시설관리사업소
수신자	운영기획과장
(경유)
제 목	납품기한 연기 요청(잠실주경기장 보일러 조달구매)

1. 운영기획과-3271, 「계약체결알림_잠실주경기장 보일러 조달구매」와 관련입니다.

2. 잠실주경기장 보일러 조달구매와 관련하여 다음과 같이 납품기한 연기를 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

- 연기내용

계약건명	계약자	계약금액(원)	연기사유	준공기한
				변경전	변경후
잠실주경기장보일러조달구매	주식회사 부스타	291,519,760	보일러 주변배관공사 시행상 공기 부족으로 납품기한 연기 필요	2016.5.22.	2016.8.31.

끝.

	시설개선과장
주무관	지양수		시설개선과장	05/23 최용덕
협조자
시행	시설개선과-5308	(		)	접수		(		)
우	05500	서울특별시 송파구 올림픽로 25 (잠실동 10번지)	/
전화	02-2240-8817	/전송	02-2240-8777	/		/	대시민공개