문서번호	시설개선과-5307
결재일자	2016.5.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설개선과장
지양수		05/23 최용덕
협 조

잠실주경기장 보일러 납품기한 연기 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

서울특별시체육시설관리사업소

시설개선과

잠실주경기장 보일러 납품기한 연기 보고

잠실주경기장 보일러 조달구매와 관련하여 아래와 같이 연기사유가 발생하여 납품기한을 연기하고자 합니다.

□ 계약내역

계약건명	계약자	계약금액	납품기한
잠실주경기장 보일러 조달구매	주식회사 부-스타 유승협	291,519,760원	2016.05.22.

□ 납품기한 연기사유

○ 연기사유 : 당초 조달요청시 납품기한을 7월 31일로 요청하였으나 조달청 3자단가 납품기준일에 의해 5월 22일로 지정됨에 따라,별도 공종인 보일러 주변 배관공사 시행상 공기가 부족하므로 납품기한 연기 필요

○ 준공기한연기 : [당초] 2016. 5. 22. → [연기] 2016. 8. 31.

□ 조치의견

위와 같이 납품기한을 연기하여 공사관리에 만전을 기하고자 함.  끝.