문서번호	급수운영과-12237
결재일자	2016.5.23.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	주무관	급수운영과장		동부수도사업소장
주재연	김광운	오기석		05/23 홍현구
협 조

2015년 동부수도사업소 관내 포장도로굴착복구공사-2차(장기계속단가계약)

준공기한 연기 검토보고

2016. 5

동부수도사업소

(급수운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

『2015년 동부수도사업소 관내 포장도로굴착복구공사-2차』

준공기한 연기 검토보고

2015년 동부수도사업소 관내 포장도로굴착복구공사-2차(장기계속단가계약) 공사계약기간이 2016.05.31.만료됨에 따라 원한할 급수공급은 물론 포장 미복구에 따른 교통지장 해소 및 주민편익을 위하여 준공기한 연기코자 함.

Ⅰ		공사개요

○ 공 사 명 : 2015년 동부수도사업소 관내 포장도로굴착복구공사-2차(장기계속단가계약)

○ 공사규모 : 아스콘포장 68a, 콘크리트포장 6a, 보도포장 6a

○ 공사기간 : 2016.02.29.~2016.05.31.

○ 공 사 비 : 556,017,840원

○ 시 공 사 : 운산레볼루션(주) 대표 박미옥

Ⅱ		공사기간

○ 당  초 : 2016.02.29.~2016.05.31.

○ 변  경 : 2016.02.29.~2016.06.30.

Ⅲ		연기사유

○ 본 공사는 건축물 신축으로 인한 상수도 인입공사 및 노후 상수도관로 교체         와 누수발생 등으로 포장굴착부분 복구 물량이 다수 발생되고 있으나,

○ 본 공사계약기간이 2016.05.31.로 금년도 공사발주로 현재 입찰공고             (2016.05.27)중으로 본 공사 계약기간내 차기(2016년도) 시공사 선정이 불가하여          부득이 공사계약까지 약 30일간 작업을 할수 없어 포장도로 미복구에 따른          민원사항 등을 대처하기 위함.

Ⅳ		소요일수 산정

○ 적격심사 : 10일(2016.05.29.~2016.06.07.)

○ 공사계약 : 10일(2016.06.08.~2016.017.)

○ 공사착공 : 10일(2016.06.20.~2016.06.30.)

Ⅴ		처리의견

○ 금년도 공사계약체결 동안 원할한 교통소통 및 주민 편익을 제공하기 위하여           2016.06.30.까지 공사기간을 연기하고자 함

○ 지체상금 부과여부 : 미부과

○ 공사기간 연장에 따른 변경계약 재무과에 의뢰 .끝.