	119특수구조단
수신자	내부결재
(경유)
제 목	소방항공대 서울3호기 외주용역 정비 계약변경 보고

1. 관련문서

가. 소방항공대-1853(2016.5.18.)호『서울 003호 2년 및 1200시간 외주 용역정비 계약변경 의뢰(추가작업)』

나. 행정지원과-6152(2016.5.4.)호『소방항공대 서울3호기 외주용역 정비 계약추진 보고』

다. 행정지원과-6019(2016.5.2.)호『소방항공대 서울3호기 외주용역 정비 수의계약 가격협의』

라. 소방항공대-1554(2016.4.28.)호『서울 003호 2년 및 1200시간 외주 용역정비 계약 의뢰』

2. 위와 관련하여 소방항공대에서 요구한 “소방항공대 서울3호기 외주용역 정비”건에 대하여 외주용역 정비 과정에서 추가업무가 발생되어 다음과 같이 계약변경 하고자 보고 합니다.

가. 건    명 : 소방항공대 서울3호기 외주용역 정비

나. 사업내용 : “과업지시서” 참조

다. 계약금액 : ************************

라. 예산과목 : 특수구조단 운영 / 소방항공대 운영 / 공공운영비

마. 계 약 일 : 2016. 5. 4.(수)

바. 계약방법 : 수의계약(1인견적)

사. 계약상대자

업체명	대표자	소재지	사업자등록번호	연락처
**** *******	***	********************	************	************

아. 변경내용

	변경전	변경후	추가업무
계약금액	************	************	Retainer Clip과 Shaft의 교환
계약기간	2016.5.4.～2016.5.31.	2016.5.4.～2016.5.31.

자. 완수기한 : 2016.5.31.(화)까지

붙임  1. 용역변경계약서(초안) 1부

2. 과업지시서 1부

3. 추가작업합의각서 1부  끝.

담당자	성재욱		행정지원과장	권태미		119특수구조단장	05/23 김재학
협조자
시행	행정지원과-6892	(		)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 퇴계로26길 52	/
전화	02-3706-1915	/전송	02-3706-1929	/	gaja1813@seoul.go.kr	/	부분공개(5)