투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	예정공정 변경 송부

1. 서지9-3시감제16-141(16.5.18), 진우-*******01(2016.01.08. 공사착공계)호와 관련입니다.

2. 상기대호와 관련 서울지하철9호선 연장건설 3단계 신호보안설비공사에 대하여 예정공정 변경내용을 아래와 같이 송부하오니 업무에 참고바랍니다.

가. 공사명 : 서울지하철9호선 연장건설 3단계 신호보안설비공사

나. 계약금액 및 공사기간 : 변경없음

- 계약금액 : 1,537,364,000원

- 공사기간 : 2016.01.08.~2016.12.31

다. 계약자 : 진우산전주식회사 대표 정진태

라. 예정공정 변경내용(공사기간 및 계약금액 변경없음)

구분(2016년)		3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
월	당초	6.47	6.30	6.30	6.50	10.52	10.52	13.44	13.25	13.24	13.46
	변경	0.00	1.20	3.76	9.50	13.25	14.10	13.80	15.24	18.94	10.21
누계	당초	6.47	12.76	19.07	25.57	36.09	46.61	60.05	73.30	86.54	100.00
	변경	0.00	1.20	4.96	14.46	27.71	41.81	55.61	70.85	89.79	100.00

마. 변경사유 : 선행공정(구조물, 궤도) 지연에 의한 하반기 공사 집중시행

바. 감리단의견 : 첨부.(적정)

첨부   감리단검토 공문 1부. 끝.

	도시철도설비부장
주무관	김창환		신호과장	김영하		도시철도설비부장	05/23 정찬웅
협조자
시행	도시철도설비부-5423	(		)	접수		(		)
우	04520	서울시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스 8층 도시철도설비부	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	772-7326	/전송	772-7308	/	fact@seoul.go.kr	/	대시민공개