문서번호	계약심사과-9000
결재일자	2016.5.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관	토목심사팀장	계약심사과장
신정	김종호	05/23 김성규

계약심사 재심의 요청에 대한 조치계획

[한남1고가 보수공사]

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 5

[한남1고가 보수공사]

계약심사 재심의 요청에 대한 조치계획

「한남1고가 보수공사」에 대한 계약심사 재심의 요청 사항에 대하여 검토하고 조치계획을 수립하여 계약심사 업무 추진에 만전을 기하고자 함

Ⅰ				관련 근거

□ 서울특별시 계약심사 업무처리 규칙 제7조 제3항

발주부서의 장은 심사부서의 장이 통보한 계약심사 결과에 이의가 있거나, 수용하기 곤란한 특별한 사유가 있으면 소명서를 첨부하여 심사부서의 장에게 재심사를 요청할 수 있다

Ⅱ				재심사 요청내용

□ 공 사 명 : 한남1고가 보수공사

□ 추진경위

○ ‘16. 04.18 : 계약심사 요청(교량안전과 → 계약심사과)

○ ‘16. 05.03 : 계약심사 결과통보(계약심사과 → 교량안전과)

○ ‘16. 05.04 : 계약심사 보완 제출(교량안전과 → 계약심사과)

□ 재심사 요청내용

○ 콘크리트 표면보수(No.9호표)

- DPCON공법 침투․결합방수제(comb, color, top)합쳐서 롤러 2회 적용하였으나

- DPCON-comb, DPCON-color, DPCON-top 각 별도로 롤러 2회 적용(DPCON 특별시방서 참조)하여야 함

Ⅲ				재심사 요청사유별 검토의견

구 분	재심사 요청	검토의견	비고
콘크리트표면보수	콘크리트표면보수 DPCON공법의 칠공사(dpcon-comb, color, top)각 공종별로 롤러2회 인력품(도장공, 보통인부)반영하여야 함	- 당해공사 특별시방서에 DPCON공법의 칠공사는 3개 공종(dpcon-comb, color, top)으로 구분하고 각 공종별 도색 회수(롤러 2회)를 규정하고 있어 - 특별시방서 규정에 따라 도색 회수를 조정 요청하는 사항은 타당하므로 재심사 수용 ※ 특별시방서 요약 참조	반영

Ⅳ				조치 계획

○ 콘크리트표면보수(DPCON공법) 칠공사(dpcon-comb, color, top)에 대하여 특별시방서를 참조하여 공종별로 롤러 2회 반영하여 통보코자 함.

따로붙임 : 특별시방서(DPCON공법) 요약1부.  끝.