투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서울지하철 9호선 3단계 918, 920공구 건설공사 전면책임감리원 귀하
(경유)
제목	자전거 주차장 설치 불가에 따른 실정보고 요청(918, 920공구)

1. 도시철도토목부-3914(2016.3.30.)호 및 송파구 교통과-14650(2016.4.21.)호와 관련입니다.

2. 931정거장, 934정거장 지하에 설치예정인 기계식 자전거 주차장이 대형 상수도관 등 지하매설물 간섭으로 설치가 곤란하여 관할 자치구와 협의결과 지상 거치대 설치의견이 있어 아래와 같이 업무지시하니 각 공구 책임감리원은 조속한 시일 내에 실정보고하여 주시기 바랍니다.

가. 설계변경을 위한 수량, 공사비 증·감 내용 및 감리 검토의견서

나. 도시관리계획 변경 서류 등

붙임 : 송파구 협의공문 사본 각 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	서재원		주무관	문병종		토목2과장	방영복		도시철도토목부장	05/23 김진팔
협조자	주무관	한재호		주무관	유원하
시행	도시철도토목부-6446	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동 96) 프리미어플레이스 9층	/
전화	02-772-7125	/전송	02-772-7306	/	seojw83@seoul.go.kr	/	부분공개(5)