문서번호	문화정책과-7085
결재일자	2016.5.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관	문화시설팀장	문화정책과장
이지나	代신은주	05/23 박대우

돈화문 민요박물관 기본계획 수립 용역

용역기간 연장 시행계획

2016. 5.

문 화 본 부

(문화정책과)

「돈화문 민요박물관 기본계획 수립 용역」
용역기간 연장 시행계획

돈화문 민요박물관 기본계획 수립 용역을 수행함에 있어 중간보고회 결과에 따른 전문가 의견 등을 반영하기 위해 용역기간을 연장하고자 함

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 돈화문 민요박물관 기본계획 수립 용역

○ 용역기간 : 2015.12.30.~2016. 5.27.(5개월)

○ 용 역 비 : 금 58,570,000원

○ 용역업체 : ㈜금성종합건축사사무소 외 1(한양대에리카산학협)

○ 주요 과업내용

- 동종시설 현황조사․분석 및 차별화 방안

- 민요박물관 기본계획(안), 사업시행방안 제시

- 민요음원 등 소장품 수집 및 전시계획 설계, 관리운영방안 등

□ 용역기간 연장(안)

○ 연장내용

계약금액	변경 없음
계약기간	당 초	2015. 12. 30. ~ 2016. 5. 27.
	변경후	2015. 12. 30. ~ 2016. 7. 16.
과업내용	변경 없음

○ 연장사유

- (학술분야) 민요박물관 건립 타당성을 논리적으로 보완하고 이에 대응하는 구체적인 콘텐츠 및 프로그램, 실행방안 등을 제시할 필요가 있다는 자문위원 의견을 수렴하여 과업 완성도 제고

- (기술분야) 총괄건축가의 건축계획 보고 요청 이행 및 보고결과를 용역과업에 반영

□ 향후계획

○ 계약기간 연장 요청(→재무과) : '16. 5. 23.

- 용역기간 연장 관련 재무과 통보하여 계약변경 조치

○ 건축계획(안) 보고(→도시공간개선단) : '16. 6월 3주

-총괄건축가 자문결과('15.3월)에 따른 민요박물관 건축계획(안) 보고

○ 최종보고 전 실무회의 : '16. 6월 3주~7월 1주

○ 최종보고회 개최 : '16. 7월 2주

붙	임	합의각서 1부.  끝.