문서번호	방재시설부-3389
결재일자	2016.3.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		치수시설과장	방재시설부장
박중모		김흥근	03/11 임춘근
협조

- 합정외 1개소 빗물펌프장 증설공사 -

실정보고(폐기물 수량 변경 등) 승인요청 검토보고

2016. 03

방재시설부

(치수시설과)

- 합정외 1개소 빗물펌프장 증설공사 -

실정보고(폐기물 수량 변경 등) 승인요청 검토

「합정외 1개소 빗물펌프장 증설공사」의 “폐기물 발생 및 처리물량 조정 건” 실정보고 승인요청에 대한 검토 보고임.

【 관련근거 : 서울시설공단 공사감독1처-1367(2016.03.08.)호】

□ 공사개요

□ 공 사 명 : 합정외 1개소 빗물펌프장 증설공사

□ 공사위치 : 마포구 합정동 196-4, 성산동 99-5 일원

□ 공사규모 : 빗물펌프장 증설 2개소(합정, 중동)

□ 공사기간 : 2013. 1. 4 ~ 2016. 4. 30

□ 도 급 비 : 5,297,369천원

□ 시공사/감리사 : (주)금강주택 / 서울특별시시설관리공단

□ 실정보고내용

□ 중동빗물펌프장 추가공사(리모델링, 레이커 반력대, 토출관 지중화)시  처리한 폐기물 수량을 본 공사『폐기물 처리용역』도급비에 미반영

- 폐콘크리트 : 343톤, 건설폐재류 : 127톤, 혼합건설폐기물 : 99톤

□ 합정빗물펌프장 기존관로 개량구간(PC BOX) 기존 포장두께 상이(당초 추정 0.15cm, 실제 0.25cm)로 깨기 물량 증가, 기존가옥 철거 구간외 바닥깨기, 철거가옥에서 석면 5톤 및 폐합성수지 22톤(소각폐기물)이 발생하여 전문업체에 의뢰하여 별도 처리한 비용 미반영

□ 감리자 의견(시설관리공단)

□ 폐기물 수량 추가반영, 수량, 단가적용 등에 대하여 검토결과 “적정” 하여 공사 및 폐기물처리용역 설계변경시 반영

- 도급비 증가 : 공사 13백만원, 폐기물 처리용역 24백만원

□ 보고자 의견

□ 상기 내용을 검토한 결과 감리자 검토의견이 타당하다고 판단되어 승인 통보하고, 향후 설계 변경시 반영토록 조치하고자 함.

붙 임 : 1. 공단 실정보고 관련서류 1부.

2. 관련사진 1부.  끝.