문서번호	건축부-5463
결재일자	2016.4.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
전문관		의료시설과장	건축부장
전재진		김충범	전결 04/27 안재혁
협조
	주무관		강철규

서남권 50+ 캠퍼스 건립공사(총차 및 1차)

설계변경 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

도시기반시설본부

건  축  부

서남권 50+ 캠퍼스 건립공사(총차 및 1,2차)

설계변경 검토 보고

「서남권 50+ 캠퍼스 건립공사」관련  책임감리자로부터 제출된 설계변경 (내역조정) 총차 및 1차에 대한 처리 방안 보고임.

1		관련 근거

◌ 휴서건 제16-76(2016.4.25.)호 실정보고(책임감리 – 휴다임건축사사무소)

◌ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제73조(설계변경으로 인한 계약 금액의 조정)

2		변경 내용

◌ 공사금액 : 총차-6,097,167천원(1차-367,295천원)

◌ 공사기간(총차 및 1차) : ‘16.01.07 ～’17.07.06(1차: ‘16.01.07～’16.05.02)

◌ 시 공 사 : ㈜이공외 1개사

◌ 감 리 사 : ㈜휴다임건축사사무소

◌ 설계 변경 금액 (전체)                                        (단위 : 원)

구 분	계약금액	변경내용	공사기간	비 고
총 차	6,097,167,000	내역변경	‘16.01.07～’17.07.06
1 차	367,295,000	내역(조정)변경	‘16.01.07～’16.05.02	공사계약 금액 변경 없음
2 차	4,707,140,000	내역변경	‘16.05.03～’17.03.15

◌ 주요변경 내용 :H-PILE 인발, 강성제거등 1차공사 내역중 시공 불가에 따른 내역조정등(계약 금액변경 없음)

◌ 1차 계약변경(내역조정)                          (단위:원, 부가세포함)

공 종	당초금액(a)	변경금액(b)	증액(b-a)	비 고
건축공사	0	0	0
토목공사	367,295,000	367,295,000	0	내역조정
합 계	367,295,000	367,295,000	0	변경없음

※ 보험료 등 간접비는 총차공사시 실제사용된 사항을 내역으로 정산함

3		책임 감리 검토 의견

◌  실정보고 검토 결과 설계변경하는 것이 적정한 것으로 사료됨

4		처리 방안

◌ 책임감리자의 설계변경 검토건에 대하여 그 결과를 반영하여 총차 및 1차  설계변경을 진행(재무과 계약변경 의뢰) 하고자 함.

따로붙임 : 1. 책임감리 실정보고서

2. 총차 및 1차수 내역서.  끝.