함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	남부수도사업소
수신	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제목	설계변경 계약의뢰(2015년 동작 영등포 시설물)

우리사업소에서 시행중인 『2015년 동작 영등포구관내 상수도시설물 설치 및 보수공사에 대하여 아래와 같이 설계변경(제4회, 최종) 계약을 의뢰합니다.

가. 공 사 명 : 2015년 동작 영등포구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사(장기계속단가계약)

나. 계약상대자 : 성신진흥산업개발(주) 대표 김보민

다. 계약기간 : 2016.1.1~2016.5.31(총부기기간:2015.4.6.~2016.5.31)

라. 예산과목

- 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비 및 부대비, 시설비

- 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비, 기타교체비

마. 설계변경 사유

- 상도3배수지 환경정비 등에 따른 신규공종 발생

- 공사현장에 적합한 시공에 따른 계약물량 증·감 발생

바. 설계변경내역                                                 (단위 : 원)

구 분	당초 계약금액	변경 계약금액	증ㆍ감
총부기금액	666,119,100	722,143,000	증)56,023,900
2차수부기금액	174,001,100	230,025,000

붙 임 1. 설계변경시행품의서,(조정)설계변경 내역서 각 1부.

2. 설계변경 합의서 및 계약금액조정검토결과서 각 1부. 끝.

	남부수도사업소장
주무관	이승영		주무관	김대성		시설관리과장	05/10 우종근
협조자
시행	시설관리과-12034	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97 (신대방동)	/
전화	02-3146-4599	/전송	02-3146-4639	/		/	대시민공개