투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제목	준공기한 연기 요청(서울과학관 건립공사)

우리 본부에서 시행하고 있는「서울과학관 건립공사」준공기한을 아래와 같이 연기요청 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 준공기한 연기내역

공 사 명			서울과학관 건립 기계설비공사	서울과학관 건립 전기공사	서울과학관 건립 정보통신공사
계 약 자			인하공영(주) 외 2개사	부민통신(주)외 2개사	㈜엠케이씨티
계약금액(원)		총차	3,091,550,000	1,795,236,000	904,829,000
		2차	2,391,550,000	1,095,236,000	554,829,000
공사기간	당초	총차	2014.5.8.~2016.5.31		2014.4.23.~2016.5.31
		2차	2015.12.1. ~ 2016. 5.31
	변경	총차	2014. 5.8. ~ 2016. 6.25		2014.4.23.~2016.6.25
		2차	2015.12.1. ~ 2016. 6.25

나. 계약금액 : 변경 없음

다. 연기사유 : 선행공사(건축) 연기에 따른 후속 설비공사 연기

라. 지체상금 : 미부과

붙임 : (1) 준공기한 연기 검토보고서 1부.

(2) 준공기한 연기 동의서 각 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	진종구		녹색성장과장	代진종구		설비부장	05/24 권오식
협조자
시행	설비부-8143	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	3708-8636	/전송	3708-8659	/	jin0652@seoul.go.kr	/	대시민공개