투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	건설총괄부장
(경유)
제목	관급자재 납품기한 연기 의뢰(월드컵대교 북단 연결도로 전기공사)

우리 본부에서 추진중인『월드컵대교 북단 연결도로 전기공사 』와 관련하여

관급자재 납품기한을 아래와 같이 연기 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 건    명 : 월드컵대교 북단 연결도로 전기공사 _분전반 외 4종 구매

나. 변경사유 : 선행공종(토목) 지연에 따른 납품기한 연기

다. 납품기한 변경내용

납품요구번호	계약자	납품기한		계약금액
		당 초	변 경	변경없음
12-16-2-12341-00	(주)천일	2016.05.30	2016.12.30	35,370천원

라. 예산과목 : 도시개발특별회계, 도시안전본부, 도로계획과,                               도로건설, 간선도로망확충, 월드컵대교건설, 시설비

따로붙임 :  방침서 및 합의서 각 1부.  끝.

	설비부장
주무관	박병환		건축설비과장	김영수		설비부장	05/24 권오식
협조자
시행	설비부-8148	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02)3708-8628	/전송	02)3708-8659	/	pbhw2002@seoul.go.kr	/	부분공개(6)