문서번호	급수운영과-10633
결재일자	2016.5.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	급수설비팀장	급수운영과장		중부수도사업소장
김용만	김상웅	김수영		05/24 代서경만
협 조
	주무관		代김용만

(2015년 중구,용산구 관내 상수도시설물 설치 및 소화전 보수공사)

준공기한 연기보고

2016. 05.

중부수도사업소

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

『2015년 중구,용산구 관내 상수도시설물 설치 및 소화전보수공사』

준공기한 연기보고

우리사업소에서 시행중인 중구,용산구 일대의 각종 상수도시설물 보수공사 및 시민복지 증진에 기여하는 아래 공사에 대하여 준공기한 연기사유가 발생되어 보고 드림.

1		관련근거

○ 「상수도공사 단가계약 특수조건」  제2항. 계약기간

: 신년도 단가계약 체결 시까지 계약단가로 연장(축소)할 수 있다

2		공사현황

○ 공 사 명 : 2015년 중구,용산구 관내 상수도시설물 설치 및 소화전 보수공사(연간단가)

○ 공사기간 : 2015. 06. 01. ~ 2016. 05. 31.

○ 계약금액 : 584,610,990원

○ 공사개요 : -노후밸브교체 137개소, 밸브실정비 150개소

-철개굴상,굴하 50개소, 소화전 신설및보수 44개소

○ 도 급 자 : 뉴타임건설(주) 대표 김기현

3		보고내용

○ 준공기한 연기 사유

- 중구,용산구 관내 상수도시설물 보수공사의 원활한 추진을 위하여 「2016년 중구,용산구 상수도시설물 보수공사」를 2016.05.24일 발주 및 본청 재무과에 계약의뢰 하였으나, 2016.06.03. 17:00에 입찰 및 낙찰자 결정 예정

- 2016.06.04.~06.14 적격심사 기간 최종 결정

- 2016.06.17. 계약예정 및 착공

- 신규업체 낙찰자 결정 및 계약체결, 착공 시점이 6월 중순으로 예상되어 준공기한 연기가 불가피함.

○ 준공기한 연기 현황

- 당 초 : 2015.06.01. ~ 2016.05.31.

- 변 경 : 2015.06.01. ~ 2016.06.30.

단) 신규업체 단가계약 체결시 까지만 시행한다.

○ 귀책사유 : 중부수도사업소

○ 지체상금 : 미부과

4		조치의견

○ 상기사항에 의거 공사 준공기한을 연기하여 공사진행에 만전을 기하고자 하며, 공사기간 변경 계약을 본청 재무과로 의뢰하고자 합니다.  끝.