문서번호	급수운영과-10189
결재일자	2016.5.24.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
이보민		05/24 조상덕
협 조

설계변경 심사요청에 따른 보고 (2015년 개포1동외 14개동 상수도공사)

2016년  5월

설계변경 심사요청에 따른 보고

우리사업소가 시행하는 “2015년 개포1동외 14개동 상수도공사”의 계약물량 증․감 등 변경사항이 발생되어 본부 재무회계과에 설계변경 심사요청하고자함.

□  공사개요

□ 공 사 명 : 2015년 개포1동외 14개동 상수도공사(장기계속단가계약)

□ 공사개요 : D=13~300mm, L=1,933m

□ 계약기간 : 2015.07.14. ~ 2016.06.30

□ 도 급 비 : *************

□ 도급자 : ************

□  설계변경 현황

□ 설계변경 사유 : 시공물량 증․감 및 신규공정 발생에 따른 계약물량 조정

□ 주요 시공물량 증․감 내역

공 종		단 위	당 초	변 경	비 고
토 공	아스팔트 포장절단	m	****	****	*****
	콘크리트 포장절단	m	****	****	*****
	아스팔트 깨기(소형브레이커)	㎥	***	***	****
	콘크리트 깨기(소형브레이커)	㎥	**	**	****
부설공	스테인레스 부설공(D13)	m	**	**	****
	스테인레스 부설공(D20)	m	***	***	****
	스테인레스 부설공(D25)	m	***	***	****
	스테인레스 부설공(D30)	m	***	***	****
	스테인레스 부설공(D40)	m	***	***	****
	스테인레스 부설공(D50)	m	***	***	***

공 종		단 위	당 초	변 경	비 고
부설공	상수도관 부설공(D80)	m	***	***	*****
	상수도관 부설공(D100)	m	***	***	****
	상수도관 부설공(D150)	m	***	***	****
	상수도관 부설공(D200)	m	***	**	*****
	상수도관 부설공(D300)	m	**	*	****
구조물공	원형밸브실 설치공	개소	**	**	****
부대공	작업차량(급수공사)	개소	***	***	****
	안전원	인	***	***	****

□ 신규공정 발생내역

- 부설공 : 라인스토핑설치(300mm) 공정 추가 등

- 사급자재 : 부단수활정자관(700/200)외 3종

□ 설계변경 내역

구 분	당초 금액	변경 금액	증․감
도 급 비	************	************	*************
공급가액	************	************	*************
부가가치세	************	*************	*************

□  향후 계획

- 계약 물량 증․감 및 신규 공정 발생에 따른 ****************으로 본부 재무회계과에 설계변경 심사요청하고자함.

붙임 : 설계변경 내역서(최종) 1부.  끝.