투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시인재개발원
수신	내부결재
(경유)
제목	(2차)변경계약체결 통보(물품, 테니스장 개보수 공사 물품(인공소성토) 구매)

1. 인재기획과-6674호(2016.5.16.)와 관련됩니다.

2. 테니스장 개보수 공사 인공소성토 구매변경 계약건에 대해  다음과 같이 변경계약을 하고 그 결과를 보고드립니다.

가. 계약건명 : 테니스장 개보수 공사 물품(인공소성토) 구매(2차)

나. 계약상대자

- 상호 : ***********

- 주소 :*****************************

다. 변경내역 : 계약기간 연장

구 분	계약금액	계약기간	비고
당 초	41,008,400원	’16.3.18. ~ 4.17
변경(1차)		’16.3.18. ~ 5.15
변경(2차)		’16.3.18. ~ 5.26

라. 변경사유   : 조경공사 공정진행에 따른 순연

마. 변경계약일 : 2016. 5.16.

바. 지체상금   : 없음

사. 발주부서 담당자 : 인재기획과 오동열 주무관

붙 임 : 용역계약체결통보서 등 계약관련서류 1식.  끝.

★주무관							백일선			시설재무팀장					박계완					인재기획과장					05/24 원권식
협조자
시행			인재기획과-7183									(						)		접수											(						)
우	06756					서초구 남부순환로 340길 57번지															/			http://hrd.seoul.go.kr
전화		02 3488-2055						/전송			02 3488-2346					/	dshy@seoul.go.kr												/	부분공개(6)