문서번호	토목부-10390
결재일자	2016.5.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		터널건설과장	토목부장
지풍근		권혁대	05/24 김영수
협조
	주무관		이정원

건설폐기물 정산 검토보고

(용비교-행당중간 도로개설공사)

2016.5.

도시기반시설본부

(토목부)

건설폐기물 정산 검토보고

(용비교-행당중간 도로개설공사)

본 공사 준공(□16.5.31.)이 도래함에 따라, 현장여건 변동으로 인한 성상별 건설폐기물 수량 정산 검토보고임

Ⅰ		관련근거

○ PH16-용행감-065호(2016.5.23.) 실정보고 승인 요청(토목공사 정산에 따른 폐기물 반영)

Ⅱ		용엽개요

○ 위    치 : 성동구 금호동 용비교 북단 ~ 용비교 남단

○ 규    모 : 폐콘크리트 3,666톤, 폐아스콘 1,940톤, 건설폐재류 1톤

○ 용역기간 : 총괄(□12.4.5. ~ □16.5.31.)

○ 용 역 비 : 총괄(135,830천원)

○ 용 역 사 : ㈜해남건업

Ⅲ		보고내용

□ 성상별 건설폐기물 수량 정산 반영

○ 용비교 준공(□16.5.31.)이 도래함에 따라, 현장여견 변동으로 인한 성상별       건설폐기물 수량 정산 반영

○ 수량 증ㆍ감 현황

구 분	단 위	당 초	변 경	증ㆍ감	비 고
폐콘크리트	ton	3,666	4,127	461
폐아스콘	ton	1,940	2,190	250
건설폐재류	ton	1	-	1
합 계		5,607	6,317	710

○ 공사비 증ㆍ감 현황

(단위:원)

구 분	당 초	변 경	증ㆍ감	비 고
1. 폐기물 운반비
폐콘크리트	26,285,220	29,590,590	3,305,370
폐아스콘	13,909,800	15,702,300	1,792,500
건축폐재류	39,818	-	39,818
2. 폐기물 처리비
폐콘크리트	52,750,074	59,383,403	6,633,329
폐아스콘	30,477,400	34,404,900	3,927,500
건축폐재류	22,390	-	22,390
금액절삭	2,883	3,011	128
합 계	123,481,819	139,078,182	15,596,363
부가가치세	12,348,181	13,907,818	1,559,637
총 계	135,830,000	152,986,000	17,156,000

Ⅳ		조치계획

○ 현장여건 변동으로 인한 성상별 건설폐기물 수량 정산은 적정함으로 향후             설계 변경시 반영하고자 함

붙 임 : 감리단 검토 의견서 1부.  끝.