서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	의회사무국장
(경유)
제목	경의선 신촌~가좌간 성산천가도교 보행견결데크 공사 촉구에 대한 회신

1. 마포구의회-2246호(2016.05.20.)와 관련입니다.

2. 우리시에 시행하는 경의선숲길과 주변 지역과의 연계를 위한 성산천가도교 보수·보강 및 보행교 설치공사에 대하여 한국철도시설공단으로부터 성산천가도교 우측에 위치한 성산천철교를 통과하여 현재 운행중인 경의선철도의 안전운행 확보를 위하여 노후된 성산천철교의 교량개량 공사(현재 교량개량 설계용역 시행중)를 시공함에 있어 성산천가도교를 부득이 일부 철거해야 하므로 이로 인한 예산 중복투입 방지를 위해 공사중지 요청이 있어

3. 합동회의(서울시, 마포구, 한국철도시설공단, 설계사) 및 내부 검토한 결과 경의선숲길공원 개원에 맞추어 교량 보수·보강 후 보행교를 설치하더라도 성산천철교 교량개량공사 시 성산천가도교 상판 전부 철거 및 교각의 일부철거가 시행될 예정으로 성산천가도교인 보행교 철거가 불가피하고, 보수·보강 예산 중복투입 및 보행교 설치비용 매몰에 따른 민원 발생 우려 등으로 보행교 설치공사를 일시 중지하였으며,

4. 현재 진행중인 교량개량 설계 시 성산천가도교(폐선)를 철거하지 않는 공법을 선정하거나 부득이 철거할 경우에는 공사기간을 최대한 단축하도록 한국철도시설공단에 협조요청하였음을 알려 드립니다.

붙임 : 2016년 철도시설 개량사업 세부시행계획 승인 서류(국토부) 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	이동률		공원개발팀장	오대근		공원조성과장	전결 05/25 代유한수
협조자
시행	공원조성과-6569	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 무교로 21	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-2065	/전송	02-2133-1081	/	ryul9386@seoul.go.kr	/	대시민공개