투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	「서울시 어린이병원 삼성발달센터 증축공사」 공정관리 및 안전관리 대책 제출 요청

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리시와 계약체결하여 진행중에 있는「서울시 어린이병원 삼성발달센터 증축공사」건설사업관리 용역 및 시공에 따른 공정관리와 관련하여 귀 사에서 당초 2차계약시 제출하신 “공사예정공정표”에 의한 계획공정보다 지속적으로 낮아지고 있어 통보하오니,

3. 건설사업관리용역업자 및 시공자께서는 공사계약서, 관련법 규정에 따라 2차계약 준공(2016. 8.30)이행에 차질이 없도록 건설사업관리단과 시공사간 공정회의를 통하여 공기단축 방안등을 논의하여 공기만회대책을 수립·시행하시고,

4. 근로자 안전사고 예방대책을 포함한 부진공정 만회대책 및 만회공정표(현장대리인, 책임건설사업관리기술자 날인포함)를 5월30일까지 우리시 도시기반시설본부 건축부로 서면 제출하여 주시기 바랍니다. 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	서울시 어린이병원 삼성발달센터 증축공사 현장대리인 강영규 귀하,서울시 어린이병원 삼성발달센터 증축공사 건설사업감리단 책임건설사업관리기술자 박찬주 귀하
전문관	전재진		의료시설과장	代전재진		건축부장	전결 05/25 안재혁
협조자
시행	건축부-6687	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 (프리미어플레이스빌딩 13층)	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2635	/전송	02-3708-2659	/		/	부분공개(5)