문서번호	시설과-2701
결재일자	2016.5.25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설팀장	시설과장	동부공원녹지사업소장
최종성	代장창원	진병규	05/25 이춘희
협 조

2016년 옥상녹화·텃밭조성 사업 변경 계획(대상지 추가)

2016. 5

동부공원녹지사업소

(시설과)

2016년 옥상녹화·텃밭조성 사업 변경 계획(대상지 추가)

2016년도 옥상녹화 추가 대상지로 선정된 신림119안전센터 등 2개소 옥상녹화·텃밭조성사업 계획을 아래와 같이 수립하여 시행에 만전을 기하고자 함.

※ 관련근거 : 2016년 옥상녹화 텃밭조성 대상지 변경계획 (조경과-6466, 2016.05.09.)

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2016. 01. ～ 12.

○ 대 상 지 : 개포디지털 혁신파크 등 3개소

○ 총사업비 : 306백만원

○ 변경내용

당 초				변 경
시설명	신청면적 (㎡)	구조안전 진단면적(㎡)	사업비 (백만원)	시설명	신청면적 (㎡)	구조안전 진단면적(㎡)	사업비 (백만원)
개포디지털 혁신파크	450	668	150	개포디지털 혁신파크	668	-	234
				신림119 안전센터	125	234	44
				난곡119 안전센터	80	235	28

□ 추진경위

○ 2016.01.26 : 2016년 옥상녹화 텃밭조성 계획 시달

○ 2016.02.19.~03.19 : 건축물 구조안전진단 용역(개포디지털혁신파크)

○ 2016.04.11.~05.30 : 실시설계 용역(개포디지털혁신파크)

○ 2016.05.09 : 2016년 옥상녹화 텃밭조성 대상지 변경 계획 시달

○ 2016.05.13 : 옥상녹화사업 협약서 및 동의서 발송(신림119안전센터등2개소)

○ 2016.05.13 : 기술용역 타당성 심사 요청(건축물 구조안전진단 용역)

○ 2016.05.17 : 기술용역 타당성 심사 결과 통보(적정)

□ 세부 시행계획(추가 사업 대상지)

○ 구조안전진단은 용역비가 소액(10,340천원)으로 전문업체에 수의계약 시행

○ 설계용역 및 공사는 사업 규모가 작고 대상지 위치 고려하여 1건으로 시행

□ 향후 추진일정

○ 2016. 05 ~ 06 : 건축물구조 안전진단 및 옥상녹화 유형제안 용역 시행

○ 2016. 07 ~ 08 : 실시설계 용역 시행

○ 2016. 09 ~ 11 : 공사 시행

○ 2016. 12        : 시설물 인계

붙임 : 2016년 옥상녹화·텃밭조성 대상지 변경계획 시달 공문(서울시) 1부. 끝.