서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	「2030 하수도정비기본계획」 기술용역 과업중지 통보

1. 우리시정 발전에 대한 적극적인 협조에 감사드립니다.

2. 현재 진행중인 「2030 하수도정비기본계획」 기술용역과 관련하여 다음과 같이 과업중지를 통보하오니 법적절차에 의해 원활히 마무리 될 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.

○ 과업중지내용

· 과업중지 기간 : 360일

구분	당초		변경(안)		비고
계약 기간	총차	′13.7.22~′16.5.31	총차	′13.7.22~′17.5.20
	2차	′14.7.19~′16.5.31	2차	′14.7.19~′17.5.20

※ 환경부 승인 완료시 과업정지를 해제하고 잔여 용역기간동안 지적사항 보완 조치

· 과업중지 사유

1) 환경부 변경 승인 등 필수 법적 절차 이행

2) 관로조사 관련 용역 결과 반영 등 내용 보완 등

○ 과업중지 개시일자 : 2016.5.25.

.끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	(주)삼안 정의승,(주) 이산 이원찬,제일엔지니어링 최태희
주무관	윤혜선		하수계획팀장	김준형		물재생계획과장	05/25 하상문
협조자
시행	물재생계획과-6845	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15, 별관 1동 8층	/
전화	02-2133-3787	/전송	02-2133-1042	/	hsyun@seoul.go.kr	/	대시민공개