문서번호	문화정책과-7292
결재일자	2016.5.25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		문화관리팀장	문화정책과장
승효선		박인숙	05/25 박대우
협 조

홍대입구역 지하보도 개구부 설치 공사 발주

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과
	마포구청 3개 부서 (문화관광과, 도로과, 건설관리과)	개구부 설치관련 굴착허가 등 사전 행정절차 협의	굴착지점 지정(도로과) 현대증권앞 인도 일부분	비예산

2016.  5.

문 화 본 부

(문화정책과)

홍대입구역 지하보도 개구부 설치 공사 발주

홍대입구역 지하보도 문화창작공간 조성 前 정밀안전점검을 위한 개구부 설치공사로 원활한 안전점검 시행 및 보행자 안전 확보 등 사업 추진에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		설치 목적

○ 현재 인도, 보도로 사용하기 위하여 매립된 홍대입구역 지하보도 출입구에 맨홀식 개구부를 설치(마포구 도로과 지정위치)하여 지하보도 내부의 정밀안전점검을 시행할 수 있는 환경을 조성하고자 함.

Ⅱ		공사 개요

○ 공 사 명 : 홍대입구역 지하보도 개구부 설치 공사

○ 위     치 : 홍대입구역 현대증권빌딩 앞 인도 〔붙임1〕위치도 및 현황

○ 공사 개요                                   〔붙임2〕도면

가. 홍대입구역 지하보도 출입구 부분까지 터파기 공사, 구조물 깨기

(지름 : 1.0m 이상/ 길이  2.36m 이상)

나. 개구부 공사

- 개구부 제작 및 설치 :  사방 1.0m 이내

- 개구부 덮개 및 발판 매립 : 지상과 수평 유지

다. 바닥보도 설치

- 지하보도 지면부분과의 바닥 블록 설치 : 사방 1.0m 이상

- 개구부 입구~통로내 판넬 설치 : 3m (지하 내부)

라. 구조 및 마감 개요

- 우수,적설에 대비하여 바깥쪽으로 배수처리

- 필요시, 태풍 대비 뚜껑과 구조체에 체인형 고리 설치,날아감 방지

- 정밀안전진단 후 개구부 철거, 기존 인도와 동일형태로 마감

○ 공사 금액 : 팔백오십만삼천원 (₩8,503,000원)        ※ 부과세포함

○ 공사 기간 : 계약일부터 2주간

Ⅲ		소요 예산

○ 예산과목 : 문화정책과, 문화도시 서울 구현, 문화향유공간 및 문화기반시설 조성, 홍대지하보도를 활용한 문화창작공간 조성, 시설비(401-01)

○ 공 사 비 : 8,503,000원                〔붙임4〕공사비 견적서

- 제 료 비 : 2,180,000 원

- 노 무 비 : 2,651,130 원

- 필요경비 : 1,784,777 원

- 일반관리비 및 이윤 : 1,114,093 원

- 부 과 세 : 공급가액 10%

Ⅳ		공사발주계획

○ 공사업체 : 현대코스타 (대표 : 장정심)

- 주      소  : 송파구 가락로19길(지하 1층)

- 사업의 종류  : 시설물 유지관리업, 건설자재, 청소

○ 계약방법 : 수의계약

(지방자치단체를대상으로하는계약에관한법률 제9조 및 시행령 제25조제1항 제5호)

○ 하자보증기간

- 지방계약법 시행규칙 제68조 [별표1](공사의 종류별 하자담보책임기간)에 의함

Ⅴ		향후 계획

○ ’16. 5. 27 : 계약의뢰

○ ’16. 5. 30 ~  ’16. 6. 13 : 공사실시 (2주간)

붙 임  1) 현장사진 1부

2) 지하보도 도면 1부.

3) 산출기초조사서 1부.

4) 공사비 견적서 1부.  끝.