투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	건설총괄부장
(경유)
제목	계약변경 의뢰(공릉 빗물펌프장 외1개소 기계공사)

우리 본부에서 추진중인 「공릉 빗물펌프장 외1개소 기계공사」에 대해 아래와 같이 계약변경을 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 공릉 빗물펌프장 외1개소 기계공사

나. 계 약 자 : 고려가스산업(주) 대표 이재로

다. 계약금액 : 제1차 58,494,000원 (총차 97,629,000원)

라. 변경내용 : 계약기간

구 분	당 초	변 경	비 고
총차	2013.05.16. ∼ 2016.05.30	2013.05.16. ∼ 2016.06.30	31일
1차	2013.05.16. ∼ 2016.05.30	2013.05.16. ∼ 2016.06.30	31일

마. 변경사유 : 선행공정 지연에 따른 준공기한 연기

첨  부 : 1) 검토보고서  1부

2) 합의서      1부  끝.

	설비부장
주무관	양우창		녹색성장과장	김창균		설비부장	05/26 권오식
협조자
시행	설비부-8333	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로8 15층 설비부	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8639	/전송	02-3708-8659	/	yang7931@seoul.go.kr	/	대시민공개