문서번호	전략기획실-2375
결재일자	2016.5.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관	전략기획실장	관리부장	서울대공원장
이옥하	윤대진	심상원	05/26 송천헌
협 조
	총무과장		이경로

- 친환경 무동력 테마공원 조성 타당성조사 용역 -

준공기한 연기(2회) 검토 보고

2016. 5.

(전략기획실)

- 친환경 무동력 테마공원 조성 타당성조사 용역 -

준공기한 연기(2회) 검토 보고

명에 의거 『친환경 무동력 테마공원조성 타당성조사 용역』 감독업무 수행 중 다음과 같이 준공기한 연기 사유가 발생하여 보고합니다.

Ⅰ		용역개요

□ 용 역 명 : 서울대공원 친환경 무동력 테마공원 조성 타당성조사 용역

□ 용역기간 : 2015.10.21. ~ 2016. 5.31.

□ 계약금액 : 금192,700,000원

□ 계 약 자 : ㈜한국종합기술 대표 이강록

Ⅱ		연기사유

□ 준공기한 연기 요청 사유

- 기본구상 내용의 기술적·경제적 타당성 조사 과업 중 추가 대안 검토 등 추가 과업지시에 따른 과업기간 부족

Ⅲ		조치의견

□ 준공기한 연기

- 위와 같은 사유로 준공기한을 연기하고자 함.

구 분	변 경 사 항		비 고
	당 초	변 경 후
용역기간	2015.10.21. ~ 2016. 5.31.	2015.10.21. ~ 2016. 6.30.

- 지체상금 부과여부 : 미부과.  끝.