문서번호	시설과-2747
결재일자	2016.5.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설팀장	시설과장
최종성		代강희진	05/26 진병규
협조

「개포디지털혁신파크 옥상녹화·텃밭조성 실시설계 용역」

준공기한 연기 검토보고

2016.05

동부공원녹지사업소

(시설과)

「개포디지털혁신파크 옥상녹화·텃밭조성 실시설계 용역」

준공기한 연기 검토보고

용역개요

❍ 용 역 명 : 개포디지털혁신파크 옥상녹화·텃밭조성 실시설계 용역

❍ 용역기간 : 2016. 04. 11 ~ 2016. 05. 30

❍ 계약금액 : 금 12,500,000원

❍ 도 급 자 : 한수그린텍(주) 대표 김성주

준공기한 연기검토

❍ 검토사유 : 준공기한 연기

❍ 연기사유

- 대상지내 태양광 설치 추가 계획으로 인한 업무 협의 및 도서 작성으로 추가 소요기간 필요.

❍ 준공기한 변경

- 당 초 : 2016. 04. 11. ~ 2016. 05. 30

- 변 경 : 2016. 04. 11. ~ 2016. 06. 13 (14일 연장)

❍ 지체상금 부과 검토

- 지체상금 부과여부 : 미부과

조치계획

❍ 용역사의 준공기한 연기 신청내용이 타당하다고 판단되므로 계약부서에 변경계약(준공기한 연장계약) 요청하고자 함

붙임 : 준공기한 연기 신청 공문 1부.  끝.