투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	기반시설과장
(경유)
제목	변경계약체결통보 - 당산동~샛강생태공원간 보행육교 설치공사

1. 기반시설과-1789(2016.5.19.)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 아래와 같이 변경계약이 체결되었음을 알려드리니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 계약현황

용 역 명	당산동~샛강생태공원간 보행육교 설치공사
계약상대자	(주)오이코스 (대표 : 배장영)
계 약 금 액	금4,189,790,000원(금사십일억팔천구백칠십구만원)
계 약 일 자	2015.06.11.
공 사 기 간	2015.06.19. ~ 2016.05.20.

나. 변경내역 : 공사기간 변경(2015.06.19. ~ 2016.05.31.)

변 경 내 역	변경전	변경후
공 사 기 간	2015.06.19. ~ 2016.05.20.	2015.06.19. ~ 2016.05.31.

다. 변경사유 : 사생활 침해 민원해소 및 하천점용 계획 변경으로 추가 공사 시행에                          따른 절대공기 부족

붙     임 : 1. 공사변경계약서 1부.

2. 계약의뢰 1부.

3. 변경계약보증서 1부.

4. 변경선금보증서 1부.  끝.

	총무부장
주무관	주홍열		총무과장	代임재선		총무부장	05/26 이상국
협조자
시행	총무과-8749	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257 (성수동1가)	/
전화	02-3780-0723	/전송	02-3780-0740	/		/	부분공개(5)