문서번호	도시철도토목부-6639
결재일자	2016.5.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		토목3과장	도시철도토목부장
임경태		김정수	05/26 김진팔
협조
	주무관		장대성

『하남선(5호선 연장) 1-2공구 건설공사』

암매각 입찰결과 및 매각대금 처리방안 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 5

도시기반시설본부

도시철도토목부

『하남선(5호선 연장) 1-2공구 건설공사』

암매각 입찰결과 및 매각대금 처라방안검토 보고

공사 추진중 현장에서 발생되는 발생암(풍화암 및 연암)에 대하여 토석정보공유시스템(토싸이클)을 이용한 발생암 매각 현장설명(2016.04.27) 및 입찰을 수행한 결과(2016.04.29)와 발생암 매각대금 처리방안에 대하여 검토 보고함.

Ⅰ		관련근거

○ 대한(하남) 제16-256호(2016.5.16) : 발생암 입찰결과 및 매각대금 처리방안 보고

○ 건설기술지흥법시행령 제77조(공사의 관리)

○ 국토교통부고시제2012-호(2012.6.21.) 토적정보공유시스템이용요령 제5조(예산절감 및 성실의 의무)

Ⅱ		공사개요

○ 공 사 명 : 하남선(5호선 연장) 1-2공구 건설공사

○ 위    치 : 서울시 강동구 강일동 일원(동광교회~서울시계)

○ 규    모 : 총 연장 1,819m

- 본    선 : 471m (개착박스, 환기구 1개소)

- 입출고선 : 1,348m

○ 도 급 비 : 38,616백만원

○ 공사기간 : '15.03.30 ～ '18.07.26

○ 시 공 사 : 쌍용건설(주)

○ 건설사업관리 : ㈜대한콘설탄트 외 2개사

Ⅲ		건설사업관리단 보고내용

□ 구간별 발생암 예상량 및 발생시기

구 간 명		규 격	설계량(㎥)	발생(예상)시기	비고
본 선	4-1,2구간	풍화암	8,914	2016.10-2016.12
		연 암	1,412	2016.12-2017.01
	본선환기구	풍화암	2,848	2017.01-2017.02
		연 암	1,984	2017.02-2017.03
입 출 고 선	토공구간	풍화암	-	-
		연 암	-	-
	개착구간압	풍화암	9,121	2016.05-2016.07
		연 암	5,210	2016.05-2016.07
	입출고분기구간	풍화암	5,595	2016.10-2016.12
		연 암	902	2016.12-2017.01
	터널구간	풍화암	-	2016.10-2017.04
		연 암	7,104	2016.10-2017.04
계		풍화암	26,478
		연 암	16,612
		계	43,090

□ 암매각 추진경위

○ ‘16. 3.21 : 현장 발생암 매각방안에 대한 실정보고 (감리단→도기본)

○ ‘16. 3.23 : 현장발생암 매각방안에 대한 실정보고 승인(도기본→감리단)

○ ‘16. 4.15 : 암판정위원회 구성 현장 암판정 실시

○ ‘16. 4.25 : 발생암 매각 공고(토석정보 시스템)

○ ‘16. 4.27 : 발생암 매각 현장설명 (감리단 상황실)

○ ‘16. 4.29 : 발생암 매각 입찰(감리단 상황실)

- 참가업체 :  ㈜청현기업,(주)정선골재,(주)보광기업,(주)산하, 삼양콘크리트(주)

- 입찰공종 : 발생암(연암 및 풍화암) 매각

□ 암매각 입찰결과

○ 연  암

참가업체명	운반거리 (Km)	①입찰단가 (원/㎥)	②운반비 (원/㎥)	비고 (②-①)	적용순위
보광기업	24	7,300	17,665	10,365	②
삼양	22.4	3,000	17,404	14,404	④
청현	24	5,092	19,088	13,996	③
산하	14	3,700	13,881	10,181	①

○ 풍화암

참가업체명	운반거리 (Km)	①입찰단가 (원/㎥)	②운반비 (원/㎥)	비 고 (②-①)	적용순위
산하	14	0	12,530	12,530	①
삼양	22.4	2,500	15,553	13,053	②
청현	24	2,400	17,434	15,034	③
보광기업	24	미투찰	-	-

□ 공사비 증 · 감 현황                           (단위 : 원)

공 종 명	단 위	수 량	공 사 비			비 고
			당 초	변 경	증 감
풍화암	㎥	26,478	418,016,129	328,604,426	▽89,411,703
연 암	㎥	16,612	298,976,366	229,958,722	▽69,017,644
직접공사비			716,992,495	558,563,148	▽158,429,347
제잡비			172,607,505	130,801,252	▽41,806,253
도급액계			889,600,000	689,364,400	▽200,235,600
암매각(연암)	㎥	16,612	-	61,464,400	▽61,464,400	부가세제외
총공사비			889,600,000	627,900,000	▽261,700,000

□ 건설사업관리단 검토 의견

○ 현장암 매각절차에 따른 개찰결과 암매각 입찰단가와 운반비를 검토한 결과 ㈜산하가 가장 경제적으로 판정되어 매각입찰 적격업체로 선정하고

○ 암매각 관련 행정절차는 시공사와 암 매수자간(산하) 직접 계약 체결하여 시공사에서 매각대금을 수령하고 추후 동 금액을 시공사의 도급액에서 설계변경하여 감액하는 것이 행정절차 및 관리면에서 적정한 것으로 판단됨.

Ⅳ		보고자 의견

○ 건설사업관리단에서 제출한 실정보고 검토의견이 적정하다고 판단됨으로 암 매각대금 처리방안 실정보고 건을 승인조치하고,

○ 변경되는 도급비는 우리부 설계변경자문위원회(소위원회) 자문을 거쳐 설계변경에 반영코자 함.

붙임 : 건설사업관리단 실정보고서 1식.  끝.