투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제목	건설폐기물처리용역(전체5회, 6차1회) 준공기한연기의뢰(강남순환4공구)

1. 우리 부에서 시행중인 『강남순환도시고속도로(4공구) 건설폐기물처리용역』의 준공기한연기를 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 강남순환도시고속도로(4공구) 건설폐기물처리용역

나. 계약금액 : 전체 1,436,270천원 (6차 : 216,340천원)

다. 용역기간 : 6차(2016.2.1.~2016.5.31.), 전체(2010.3.8.~2016.5.31)

라. 용역업체 : ㈜방태

마. 예산과목 : 도로계획과, 도로건설, 도시고속도로망확충(도시개발특별회계), 강남순환도시고속도로건설, 시설비 및 부대비, 시설비

바. 준공기한 변경내용

구분	당초	변경	증·감
전체	2010. 3. 8∼2016. 5.31	2010. 3. 8∼2019.12.31	증) 43개월
6차	2016. 2. 1∼2016. 5.31	2016, 2. 1∼2016.12.31	증) 7개월

붙임 : 1. 준공기한연기검토보고서 1부.

2. 준공기한연기의뢰서 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	남덕희		도시고속도로과장	명경출		토목부장	05/27 김영수
협조자	주무관	시희식		계약2팀장	홍연화
시행	토목부-10716	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-8666	/전송	02-3708-2599	/	heedeok@seoul.go.kr	/	대시민공개