문서번호	토목부-10717
결재일자	2016.5.27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
★주무관	터널건설과장	토목부장
이정원	권혁대	05/27 김영수
협 조

시설공사 등 준공기한 연기

(응봉교 확장 및 성능개선공사)

2016. 5.

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

시설공사 등 준공기한 연기 검토 보고

(응봉교 확장 및 성능개선공사)

응봉교 시점부 하부 주민편의시설 설치, 응봉역사 방음벽 설치, 교량 승강기  연결로 설치에 따른 절대공기 부족으로 준공기간 연기에 대한 검토 보고 드림.

※  당초 '08.10.20.~'16. 6.30. → 변경  '08.10.20.~'16. 8.31.

1		관련근거

○ 건화감 제2016-1276호(2016. 5.24.) 설계변경도서 제출

2		공사개요

○ 공 사 명 : 응봉교 확장 및 성능개선공사

○ 공사위치 : 성동구 응봉동 대림아파트 ~ 성수1가 삼표레미콘

○ 공사규모 : 폭 4차로→6차로, 연장 633m, 성능개선:DB-18→DB-24

○ 공사기간 : ‘08.10.20.∼ ’16.6.30.

○ 사 업 비 : 87,814백만원

○ 감 리 단 : ㈜건화 외 1개사

○ 시 공 사 : 한신공영(주)

○ 공 정 률 : 96%

3		보고내용

▢ 준공기한 연기사유

- 본 공사의 전체 공정율이 96%로 준공기한이 2016.6.30.까지이나 응봉교 시점부 하부공간 주민편의시설 설치와 응봉역사 방음벽 설치,교량승강용 편의시설(엘리베이터) 연결로 설치 등에 따른 절대공기가 부족하여  2016. 8. 31.까지 준공기한 연기가 필요함.

▢ 잔여공정 현황

구 분	설 계 도 면	연장기간	비고
○ 주민편의시설 설치 - 운동기구 : 12개 ·윗몸일으키기 ·허리돌리기 ·온몸근육풀기 ·공중걷기 ·하체흔들기 ·어깨근육풀기 ·체스트프레스 등 - 나무의자 11개 - 관람대 등	관 람 석 계 단 보도블럭 보도블럭 보도블럭	25일
○ 응봉역 방음벽설치 - 흡음형방음벽 h=5.0m, L=44.5m		20일
○ 교량 승강용편의 시설(엘리베이터) 연결로 설치		17일
공기연장필요 일수		62일

▢ 총사업비 현황                                      (단위:백만원)

구 분		계	기투자 (~2014년)	2015년	2016년	비고
계		87,814	71,272	7,264	9,278
	시 설 비	81,906	65,722	6,906	9,086
	감 리 비	4,268	3,910	358	192
	보 상 비	640	640	-	-
	설 계 비	1,000	1,000	-	-

▢ 공사기간 변경

구 분		당 초	변 경	증·감
전체	시설공사	'08.10.20.~'16.06.30.	'08.10.20.~'16.08.31.	증)62일
9차		'16.01.14.~'16.06.30.	'16.01.14.~'16.08.31.
전체	전면책임 감리용역	'08.10.27.~'16.07.29.	'08.10.27.~'16.09.20.	증)53일
9차		'16.01.01.~'16.07.29.	'16. 01.01.~'16.09.20.
전체	건설폐기물 처리용역	'09.01.06.~'16.06.30.	'09.01.06.~'16.08.31.	증)62일
8차		'16.01.01.~'16.06.30.	'16.01.01.~'16.08.31.

4		검토의견

▢ 본 공사진행중 민원에 의한 추가공사등으로 당초 준공기한이‘2016.6.30.이나 준공기한내 사업 준공이 불가함에 따라 행정처리및공정 추진현황을 반영하여 상기와 같이 시설공사, 감리용역, 폐기물 처리용역에 대한 준공기한을 연장하여 추진하고자 함.

▢ 연기에 따른 귀책 소재 : 도급계약자 귀책사유 없음 (지체상금 미부과)

붙  임 : 감리검토의견서 1부.  끝.