투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울역사박물관
수신	주식회사 범진조경 대표 김범식
(경유)
제목	서울역사박물관 조경 유지관리공사(연간단가) 작업지시-1차 변경 및 2차

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리 박물관과 계약체결하여 시행중인『2016년 서울역사박물관 조경 유지관리공사(연간단가)』에 대해서 아래와 같이 제1차 작업지시 변경 및 2차작업지시하오니 작업기간내 완료 후 보고서(도면, 내역서, 공사 전․중․후 사진)를 제출하여 주시기 바랍니다.

□ 1차 작업 변경 지시  시설과-1881호(2016.4.19.) 관련

구 분	당 초	변 경	비 고
물량변경	잔디 식재 20㎡ 산철쭉 이식 305본	잔디 식재 6㎡ 산철쭉 이식 100본
작업기간	2016.4.20.~5.10.	2016.4.20.~6.10.

□ 2차 작업지시

가. 작업지시번호: 2016-2

나. 작업기간: 2016.5.30.~6.10.

(※ 작업일정은 기간중 발주기관과 별도 협의 시행)

다. 작업내역

위 치	지 역	작 업 내 용	비 고
서울역사 박물관	느티나무길	- 산철쭉 180주 식재
	모란꽃길	- 산철쭉 70주, 회양목 100주, 맥문동 700본 식재
	모란꽃길 → 주차장	- 쥐똥나무 40주, 맥문동 800본 식재
백인제가옥	사랑채	- 잔디 100㎡ 식재
	대문간채	- 마사토 5㎥ 포설

붙임: 1차 작업내역서(변경) 1부.

2차 작업내역서 1부.  끝.

	서울역사박물관장
주무관	이재미		시설과장	전결 05/27 오삼록
협조자
시행	시설과-2638	(		)	접수		(		)
우	03177	서울특별시 종로구 새문안로 55 서울역사박물관	/	www.museum.seoul.kr
전화	02-724-0122	/전송	02-724-0244	/	int1234@seoul.go.kr	/	대시민공개