문서번호	산지방재과-5832
결재일자	2016.5.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		사면정비팀장	산지방재과장
유진석		정상모	05/27 박기범
협조
	주무관		김계영

노원구 낙찰차액 사용승인 요청사항 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 5.

푸른도시국

(산지방재과)

노원구 낙찰차액 사용승인 요청사항 검토보고

노원구에서 2016년 산사태 예방사업(3건) 시행중 현장여건 변경 및 민원을 반영하고, 수락산 염불사 등산로구간 석축 노후로 균열발생 및 배부름 현상이 있어 등산객의 안전을 위해 사업대상으로 추가, 긴급 정비하고자 낙찰차액 사용을 요청하여 보고드림.

1. 관련근거 : 노원구 공원녹지과-11839(2016.05.02)호, 노원구 공원녹지과-13658 (2016.05.20)호, 노원구 공원녹지과-13657(2016.05.20)호.

2. 공사현황

○ 위    치 : 상계동 산161-5 등 10개소

○ 점검일시 : 2016. 5. 9

○ 시·구 합동점검 : 산지방재과, 노원구 공원녹지과

○ 낙찰차액 사용승인 요청(예방사업10개소, 긴급정비 1개소 추가)

사 업 명	공사기간	배정액	계약금액	낙찰 차액	사용 요청액	설계변경내용
합 계		1,039,485	926,471	113,014	66,286	낙찰차액 사용잔액 : 46,728
상계동 산161-5 (연화사)등 3개소	’16.03.23~ 06.20	302,400	270,365	32,035	7,240	- 공사현장 여건 및 민원사항에 따른 물량변경 • 큰돌기슭막이 0 → 40m • 깬돌기슭막이 0 → 185㎡ • 초화류식재 1,820주 → 0주
월계동 779 (비석골공원)등 3개소	’16.03.23~ 06.05	157,475	137,244	20,231	13,003	- 공사현장 여건 및 사면안전성 확보를 위한 시설물 변경 • 격자블럭 730㎡ → 0㎡ • 비탈면녹화 0 → 730㎡ • 식생토낭 35m → 0m • 3단통나무편책 0 → 23경간
상계동 산153-1 (혜화사)등 3개소	’16.03.23~ 06.20	222,140	196,520	25,620	25,053	- 공사현장 여건 및 민원사항에 따른 물량변경 • 천단설치 0m → 341m • 혼합종자파종 0 → 520㎡ • 통나무편책 0 → 40경간
상계동 산158 (덕릉고개주변)	’16.03.23~ 06.20	341,353	307,022	34,331		-
상계동 산158 (덕릉고개)등10개소 시공감리용역	’16.03.10~ 07.07	16,117	15,320	797		-
수락산 염불사 주변 등산로 정비					20,990	- 석축정비(긴급 요청사업) • 규모 : H=1.5~2m, L=40m - 전문가 자문 및 의견 반영 • 집중호우시 붕괴우려 전면보수 필요

(단위 : 천원)

○ 현황사진

중계동 산101-18 (통교사 주변) 깬돌기슭막이 설치구간	월계동 63-1(초안산근린공원) 녹생토공법 구간
상계동 산152-1(통불암주변) 통나무편책 설치구간	수락산 염불사 주변 등산로 노후석축 균열발생

3. 조치의견

○“2016년 산사태 예방사업”3건은 사면보강의 적정성을 기하고 민원해결을 위해 설계변경이 발생한 것이므로 낙찰차액을 사용하여 우기전(6월)까지 완료하고자 함.

○ 수락산 염불사 주변 등산로구간 석축은 노후되어 균열 및 배부름현상이 있어 등산객 안전을 위하여 긴급 정비가 필요하므로 낙찰차액을 활용, 추가 사업으로 시행코자 함.

○ 예산현황(노원구)

(단위 : 백만원)

구 분	배정액	계약금액	낙찰차액	승인액	비 고
계	1.039	926	113	66
낙찰차액사용요청사업	1,039	926	113	45	예방사업 3건 사용승인
긴급정비 요청사업				21	낙찰차액 활용통보

붙임 : 1. 낙찰차액 사용승인요청 공문 2부.

2. 긴급정비사업 예산배정요청 공문 1부.

3. 실정보고서 4부 및 자문결과보고서 부.

4. 감리보고서 4부.

5. 전문가 자문의견서 및 염불사 회신문. 각1부. 끝.